		[ 자력과 내생행정 ] 지역자원과 연계한 남구발전
7-1		부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전
		[ 기획감사실 ]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○		○	○

□ 사업목표

○ 4차 산업혁명과 디지털 금융혁신 생태계 조성

○ 국가균형발전의 시대적 흐름에 맞는 금융관련 공공기관 이전

□ 사업개요

[부산국제금융센터 3단계 개발]

○ 위    치 : 남구 문현금융로 40(문현금융단지 내)

○ 규    모 : 부지 10,293.8㎡ / 연면적 146,553.88㎡

▷ 지하5층, 지상45층, 지식산업센터 및 업무시설 등 지원시설

○ 사업기간 : 2020. ~ 2025.(시행사 맥서브 컨소시엄, 책임시공 대우건설)

○ 사 업 비 : 4,300억원 (추정) 민자

[KDB산업은행 이전]

○ 위    치 : 남구 문현동 1228-1번지

○ 규    모 : 부지 16,973㎡

○ 규    모 : 부지 16,973㎡, 지상45층

○ 사업기간 : 2024. ~ 2027.

○ 사 업 비 : 약 4000억원(예정)

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2028
부산국제금융센터 3단계 개발 및 공공기관 추가 이전	BIFC 3단계 준공 및 한국산업은행 착공	이전계획 수립 (산업은행)	한국산업 은행법 개정	한국산업은행 착공	BIFC 3단계 준공	한국산업은행 준공 및 본사이전

□ 추진사항

○ 2008.12. ~ 2014.06. : 부산국제금융센터 1단계 조성

○ 2015.08. ~ 2018.11. : 부산국제금융센터 2단계 조성

○ 2019. 6. : KDB산업은행 및 한국수출입은행 유치 건의(구 → 시)

○ 2019.12. : 공공기관 추가 이전 건의(구 → 균형위)

○ 2020. 4. : 3단계 개발 민간사업자 공모

○ 2020. 6. : 국가균형발전정책 입장문 발표(남구)

○ 2020.10. : 사업협약 체결(부산도시공사 ↔ 맥서브 컨소시엄)

○ 2020.12. : 토지매매계약 체결(부산도시공사 ↔ 맥서브 컨소시엄)

○ 2021. 2. : 개발관련 인·허가 추진(안전영향평가, 소방성능심의)

○ 2021. 2. : 지원협의체 구성(부산시, 남구, 부산도시공사, 시행사 등)

○ 2021. 4. : 디자인 가이드라인 심의 변경자문 신청서 제출(구 → 시)

○ 2021. 5. : 지식산업센터 신설 승인, 건축교통통합심의(조건부 의결)

○ 2021.10. : 건축허가

○ 2022.01. : 한국산업은행법 일부개정법률안 발의(서병수 외 14)

○ 2022.03. : BIFC 3단계 착공(3.7.)

○ 2022.05. : 윤석열정부 110대 국정과제 실천과제 포함(KDB산업은행 이전)

○ 2022.07. : 한국씨티은행 등 외국계 금융기관 3개사 입주

○ 2022.10. : 부산시의회 이전 촉구 결의문 채택(10.7.)

구청장·군수협의회 이전 촉구 성명 발표(10.13)

□ 검토사항

○ KDB산업은행 이전반대 여론(금융노조, 수도권 국회의원)

- 강석훈 회장 이전 입장 표명

▷ 7.28. 국회 업무보고 대정부질의 시 답변

▷ 9.14. 취임 100일 기자간담회(국정과제, 4차산업혁명 전진기지 및 부·울·경 경제 부흥 역할)

○ 이전 공공기관 및 국내·외 금융혁신 기업유치를 위한 조속한 사업추진

○ 목표일정 추진을 위해 區 인·허가 관련부서 적극적이고 유기적인 협조

부산시	금융블록체인담당관	담당관	이기종	4860	금융육성팀장	김창현	4873	담당자	전승목	051.888.4872
					금융기관이전TF팀	김채원	4283	담당자	배철우	051.888.4282
남구	기획감사실	실장	강광호	4010	기획팀장	이혜령	4013	담당자	오병주	051.607.4014

□ 향후계획

[부산국제금융센터 3단계 개발]

○ `25.08. : 준공(3단계)

[KDB산업은행 이전]

○ 2022. 이전계획 수립(산은) → 2023. 하반기 ‘한국산업은행법’개정

→‘산업은행의 이전공공기관 지정안’상정·심의·의결(국가균형발전위원회)      → 이전 공공기관 고시(국토교통부)

□ 기대효과

○ 지역간 불균형 해소, 지방 소멸 방지, 국가균형발전에 기여

○ 지역인재 취업 기회 확대 및 지역경제 활성화 기여

▼  위치도

▼ 조감도