		[ 실용과 혁신행정 ] 실용주의적 지역혁신 성장 추진
10-2		용호부두(별빛공원) 마리나 요트클럽 유치
		[ 관광체육과 ]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○					○

□ 사업목표

○ 용호부두 일원에 누구나 즐길 수 있는 미래지향적 관광자원인 요트 마리나 시설 유치로 부산 해양관광의 중심축 도약

□ 사업개요

○ 위    치 : 용호동 5-5번지 용호부두 일원

○ 사 업 비 : 70백만원

○ 내    용 : 마리나 요트클럽 유치를 위한 타당성 조사 용역

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
용호부두 마리나 요트클럽 유치	요트 마리나 시설 상위계획 반영	타당성 용역비 확보 (2023년도 본예산)	타당성 용역 착수 및 완료	마리나 시설 상위계획 반영 건의	상위계획 반영 (항만재개발 및 마리나항만 기본계획)	사업 시행

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	70		70
국비
시비
구비	70		70
기타

□ 추진사항

○ 2022.07.  부산항만공사 방문협의

▷ 마리나 시설 조성 시 용호부두 재개발계획과 사업 중첩될 수 있어 연계 추진 필요

▷ 남구에서 마리나 시설 도입 타당성 검토 및 기본구상 용역 필요

○ 2022.07.  해양수산부 항만연안재생과 유선문의

▷ 마리나 시설 조성(계류장, 클럽하우스, 선용품 공급시설 등 편의시설 필수)

시에는 마리나항만 기본계획(해양수산부)에 반영 필요

▷ 용호부두 재개발계획은 포괄적 지구계획으로 사업 제안 시 마리나 계류장 포함 가능

○ 2022.10.  해양수산부 항만연안재생과 유선문의

▷ 제 3차 항만재개발 기본계획 및 제 2차 마리나 항만 기본계획 수정반영시기

- 구체적인 계획은 나오지 않았으나, 2024년부터 순차적으로 진행할 계획(공문발송 예정)

○ 2022.11.  부산항만공사 방문

▷ 마리나 조성 용역사업과 용호부두 재개발사업 연계 추진 협조 요청

○ 2022.12. 구청장, 부산항만공사 사장 간담회 개최

▷ 용호부두 마리나 조성 사업 방향성 확인 및 추진 협조 요청

○ 2022.12. 타당성 및 기본계획수립 용역비 확보(2023년도 본예산, 70백만원)

○ 2023.01. 계약심사 요청

○ 2023.01. 계약심사 반려요청(관광체육과 → 기획감사실)

□ 검토사항

○ 마리나 항만 조성지 적합성 검토

▷ 공약(용호부두 마리나 요트클럽 유치) 이행을 위해서는 요트 계류를 위한 마리나 시설 조성이 수반되어야 하며, 마리나 항만 조성은 항내 정온도가 확보되어야함  ※정온도 : 항만에서 파도의 잔잔한 정도

○ 마리나 시설 조성 타당성 조사 용역을 통해 기상여건, 지리적여건과 이용수요(인근 마리나 대비 경쟁우위 요소 확보), 수익성 등 경제성 분석 필요

○ 미래 해양관광자원 구축을 위한 용호만 해상 조명음악분수 조성 타당성용역 병행 추진

○ 마리나조성 타당성조사용역 소요인력 산정 시 인건비 요율 과다 적용(계약심사 주요의견)

▷ 용역 과업 및 설계내역서 재검토 필요(수정 및 보완)

○ 현재, 부산지방해양수산청에서 용역 중인 『용호부두 방파제 연장공사 기본설계용역』완료(2022.05.준공예정) 시 결과 자료를 본 과업에 활용

▷ 기초자료조사, 현지조사(지형 및 수심측량, 지반조사 및 시험 등), 수치모형 실험 등 자료 참고하여 본 용역 발주

※ 자료 활용 시 용역기간 단축(10개월→6개월) 및 용역비 감소

□ 향후계획

○ 2023.02. 부산지방해수청과 업무 협의

○ 2023.05. 용호부두 방파제 연장공사 기본설계용역 자료 요청(부산지방해수청)

○ 2023.05. 계약심사 및 사전규격공개

○ 2023.06. 용역 착수(2023.12. 용역 준공)

○ 2024.01. 마리나 조성 기본계획 수립 및 관련기관 협의

○ 2024.03. 제2차 마리나항만 기본계획 등 수정계획 건의(2025. 반영)

□ 타기관과의 협조사항

○ 요트 마리나 시설 상위계획 반영

▷“제3차 항만재개발 기본계획 수정계획(2025)”(해수부)

▷“제2차 마리나항만 기본계획 수정계획(2025)”(해수부)

□ 기대효과

○ 해양레저공간 조성으로 미래의 해양관광 수요 충족 및 해양레저 활성화

○ 용호부두와 이기대, 오륙도를 유기적으로 연결하여 수려한 해안경관을 갖춘

도심 속 해양관광의 랜드마크로 부상

부산시	해운항만과	과장	정상구	7640	항만재창조팀장	황점수	7663	담당자	손삼갑	051 888 7662
부산시	해양레저관광과	과장	박경휘	5350	크루즈마리나팀장	조종철	5363	담당자	김태훈	051 888 5365
BPA	재생개발실	실장	김병수	999-3180	재생개발실 과장	이종민	3183	담당자	배주원	051 999 3184
남구	관관체육과	담당관	김민채	4820	관광개발팀장	김춘희	5613	담당자	박경민	051 607 5611

▼  위치도

▼  현장사진

□ 추진사항

○ 2022.10.  2022년 하반기 조직개편 시행, ‘2030엑스포지원팀’ 설치 완료

□ 기대효과

○ 2030부산EXPO 연계 사업 발굴 추진 등으로 구 발전 도모

○ 2030부산EXPO 성공적 개최 기여