		[ 실용과 혁신행정 ] 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구
12-1		용당동 복합청사 신축 조속 추진
		[ 재무과 ]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○

□ 사업목표

○ 주민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 생활SOC복합화 시설로 건립하여 양질의 행정서비스 제공

○ 복합청사 건립을 통한 보건의료서비스 및 다양한 문화 활동 제공으로 문화․복지 분야의 지역 불균형 해소

□ 사업개요

○ 위  치 : 용당동 460-6번지

○ 규  모 : 대지면적 832㎡, 연면적 2,522.93㎡, 지하1층/지상5층

○ 건립비 : 12,656백만원(국비 1,267, 시비 1,144, 구비 8,445, 기타 1,800)

○ 내  용 : 용당동 행정복지센터, 건강생활지원센터, 생활문화센터, 작은도서관, 다함께돌봄센터 복합화 조성

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
용당동 복합청사 건립	공사 준공	공사 발주	공사 착공	공사 준공	복합청사 운영	복합청사 운영

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기전	임기내
			2022	2023	2024	2025	2026
합계	12,656	7,540	1,569	3,547
국비	1,267	817	450
시비	1,144	409	735
구비	8,445	4,514	384	3,547
기타	1,800	1,800
※ 기타내역 : 특별교부세 800백만원, 특별조정교부금 1,000백만원

□ 추진사항

○ 2022.09.  부산시 건설기술심의 요청

○ 2022.10.  부산시 건설기술심의(설계 및 공사기간 적정성 심의) 완료

▷ 심의결과 : 설계심의(조건부채택), 공사기간 적정성 심의(13개월 채택)

○ 2022.11.  부산시 공사 계약심사 완료, 공사 발주

○ 2022.12.  공사 계약

○ 2023.01.  공사 착공(착공일자 : 2023.1.30.)

□ 향후계획

○ 2024.02.  공사 준공

□ 기대효과

○ 주민친화형․생활밀착형 동 복합청사 건립으로 주민만족도 제고

○ 공공청사 기능 복합화를 통한 효율성 증대 및 체계적인 문화․행정․보건 등의 융합서비스 제공으로 주민 접점 행복생활권 조성

남구	재무과	담당관	김은경	4140	재산관리팀장	김민주	4153	담당자	이인선	051.607.4152

▼ 위치도

▼ 조감도