		[ 실용과 혁신행정 ] 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구
12-3		문현1동 복합청사 조속 건립
		[ 재무과 ]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○	○		○				○

□ 사업목표

○ 생활편의시설이 전무한 문현1동에 건강․독서․만남․강연 등이 가능한 다목적 복합 문화 공간 조성

○ 복합청사 건립으로 양질의 행정서비스 제공 및 지역 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 위  치 : 문현동 506-49번지 일원(문현3구역 재개발사업부지 내)

○ 규  모 : 대지면적 2,417㎡, 연면적 6,332㎡(용적률 262% 예상 산정)

○ 건립비 : 24,183백만원(구비 100%)

○ 내  용 : 문현1동 행정복지센터, 생활․체육․문화센터 등 복합화 건립

▷ 주민의견수렴 등을 통하여 복합청사 내 배치시설 선정

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
문현1동 복합청사 건립	공사 착공	-	건립 계획 수립	건축 설계공모	공사 착공	공사 추진

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026
합계	24,183			2,572	21,362	21	228
국비
시비
구비	24,183			2,572	21,362	21	228
기타
※ 부지매입비(1,626백만원)는 총사업비 관리지침에 따라 산정, 실제 지출 없음(기부채납)

□ 향후계획

○ 2023.상반기 문현3구역 재개발조합의 정비구역 및 정비계획 변경 신청 예정

○ 2023.       문현1동 복합청사 건립계획 수립, 공공건축 사업 행정절차 이행

○ 2024.       건축 설계공모, 기본 및 실시설계 용역

○ 2025.       공사 착공

○ 2026.       공사 추진

○ 2027.       공사 준공

□ 타기관과의 협조사항

○ 건립비 재원은 전액 구비로 구 재정에 많은 부담이 예상되므로 특별교부세 등 추가 국․시비 지원 필요

□ 기대효과

○ 지역 주민 누구나 이용 가능한 주민친화형 복합청사 건립으로 주민 간 교류 촉진 및 공동체 활성화에 기여

○ 복합 문화 공간 조성으로 주민들의 지식정보 접근성 및 문화 행복지수 향상

남구	재무과	과장	김은경	4140	재산관리팀장	김민주	4153	담당자	이인선	051.607.4152

▼ 위치도

▼ 현장사진