		[ 소통과 투명행정 ] 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선
2-4		동천주변 상습침수지역 근원적 해소 (문현지구 풍수해 생활권 종합정비사업)
		[안전총괄과]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
	○		○	○				○

□ 사업목표

○ 상습침수지역인 동천변 일원에 대하여 주민의 인적·물적 피해를 예방하기 위한 종합적인 정비사업을 추진하고자 함

□ 사업개요

○ 근    거 :「자연재해대책법」제12조(자연재해위험개선지구의 지정)

○ 위    치 : 남구 문현동 721-6번지 일원(이마트 및 문현교차로 일원)

○ 사업내용 : 펌프장(Q=540㎥/min, Q=360㎥/min) 설치 2개소, 하수관로정비 L=686m

재해예경보시스템 구축 2개소, 동천 홍수방어벽 L=780m

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년

○ 총사업비 : 47,252백만원(공사39,885, 보상 2,417, 기타4,950)

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026
풍수해생활권 종합정비사업	공사 착공	추진계획 수립	기본 및 실시설계 용역추진	공사 착공	공사 시행	공사 시행	공사 준공

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기내					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026
합계	47,252		2,550	11,452	11,084	11,084	11,082
국비	23,626	-	1,275	5,726	5,542	5,542	5,541
시비	11,813	-	637.5	2,863	2,771	2,771	2,770.5
구비	11,813	-	637.5	2,863	2,771	2,771	2,770.5
기타

□ 추진상황

○ 문현지구 자연재해위험지구지정 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역(2021. 9.10. ~2022. 8.5)

○ 문현지구 자연재해위험지구지정 및 풍수해 생활권 종합정비사업 추진

- 2022. 3.16. : 풍수해 생활권 종합정비사업 사업계획 제출 요청(市→區)

- 2022. 3.30. : 풍수해 생활권 종합정비사업 관련 사전협의(행안부)

- 2022. 4. 7. : 풍수해 생활권 종합정비사업 선정심사【(1차) 신청서 제출(市 자연재난과)】

- 2022. 4.20. : 풍수해 생활권 종합정비사업 선정심사【(2차) PT발표(행안부 자연경감과)】

- 2022. 4.26. : 풍수해 생활권 종합정비사업 선정심사【(3차) 현장실사(행안부 자연경감과)】

- 2022. 6.29. : 자연재해위험개선지구 지정 고시

- 2022. 9.16. :‘23년 재해위험지역 정비사업 보조금 예산안(가내시) 통보 (市→區)

▶ 부산 남구 문현지구 풍수해 생활권 종합정비사업 국비 1,275백만원

- 2022. 9.29. : 2023년 재해위험지역 정비사업 지방비 확보 계획서 제출 (區→市)

▶ 지방비 1,275백만원(시비50%,구비50%) 중 구비 분담분 637.5백만원 확보계획 제출

- 2023. 1. 1. :  2023년 재해위험지역 정비사업 지방비 확보

- 2023. 1. 5. :  2023년 재해위험지역 정비사업 국비 신청서 제출

- 2023. 1.31. :  문현지구 풍수해 생활권 종합정비사업 과업지시서 작성

□ 향후계획

- 2023.  2. : 기본 및 실시설계 기술용역 발주계획심의

- 2023.  3. : 문현지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역발주

- 2023.  9. : 실시설계 사전설계검토 협의(행안부)

- 2023. 12. : 경제성 검토, 기술심의, 계약심사 절차이행

- 2024.  2. : 공사착공

- 2027. 12. : 공사준공

□ 타기관과의 협조사항

○ 문현지구 자연재해위험개선지구 정비사업의 원활한 추진을 위하여 행정안전부 및 부산광역시에 국·시비 지원 신청

□ 기대효과

○ 내수배제 불량에 의한 시가지 침수피해 예방

○ 침수예방 : 동천변 문현2·4동 인명보호(2,826가구, 6,500명), 건물보호(824동), 시가지보호(38.74ha)

부산시	자연재난과	과장	서재덕	3040	재난예방복구팀장	이도형	2973	담당자	조영래	051.888.2974
남구	안전총괄과	과장	강미정	4640	지역안전관리팀장	봉정환	4893	담당자	조상진	051.607.4892

문현지구 자연재해위험개선지구 정비사업 계획도