		[ 정성과 행복행정 ] 문화로 꽃피는 매력도시 남구 조성
3-1		남구문화재단 설립
		[ 문화미디어과 ]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○

□ 사업목표

○ 남구 문화진흥 사업의 활성화 및 종합적인 문화 인프라 구축을 위한

(가칭)남구 문화재단 설립

□ 사업개요

○ 명    칭 : (가칭) 남구문화재단

○ 설립형태 : 출연기관(민법에 의한 비영리 재단법인)

○ 설립시기 : 2025년 하반기

○ 기본재산 : 10억원(5년간 10억원 조성)

○ 주요사업(안) : 지역문화 진흥 및 문화정책 개발, 지역예술인 육성·지원

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2023	2024	2025	2026	2027
(가칭) 남구문화재단 설립	(가칭) 남구문화재단 출범	·설립계획 수립 ·부산시 협의(1차) ·설립타당성 검토 및 심의	·부산시 협의(2차) ·조례 및 예산 확정	·법인 설립허가 및 등기 ·직원 채용 및 사무실 조성 ·문화재단 출범	문화재단 운영	문화재단 운영

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	740	-	140	200	200	200
국비
시비
구비	740	-	140	200	200	200
기타
※ 문화재단 사무실 조성비, 인건비, 운영비 별도

□ 추진사항

○ 2022. 11. 지역문화 진흥을 위한 토론회 개최

○ 2023. 01. 문화재단 설립을 위한 자문단 구성 및 회의

□ 향후계획

○ 2023. 02.  (가칭)남구문화재단 설립 기본계획 수립 연구용역 계약

○ 2023. 06.  市 재정혁신담당관 사전협의(1차)

○ 2023. 09.  BDI설립타당성 검토 자료 제출

○ 2024. 03.  출자·출연 기관의 설립운영 타당성 검토 심의

○ 2024. 03.  市 재정혁신담당관 설립협의(2차)

○ 2024. 05.  조례 제정

○ 2024. 11.  발기인 구성 및 총회 개최

○ 2025. 01.  정관제정 및 임원 공모 등

○ 2025. 03.  법인설립허가 및 등기

○ 2025. 03.  직원 채용대행 용역 발주 및 직원 교육

○ 2025. 08.  (가칭)남구문화재단 출범

□ 타기관과의 협조사항

○ 부산시 : 지방 출자·출연기관 설립을 위한 사전협의(1차) 및 설립협의(2차)

□ 문제점 및 대책

○ 기존 출연기관(남구문화원) 유사·중복 기능 검토

- 주민들에게 체계적이고 양질의 문화서비스 제공을 위한 지역문화예술기관으로

지역문화주체와 민간거버넌스 구축으로 상생협력방안 모색 필요

☞ (가칭)남구문화재단 설립계획 수립 시 문화원과의 역할 정립, 상생방안 강구

○ 문화재단의 조속한 출범을 위한 방안 강구

- 설립 타당성 검토 심의 기간 중 조례 초안 마련

- 市 설립협의(2차) 완료 후 의회 조례안 제출

□ 기대효과

○ 문화시설 및 예술인들의 문화자원 네트워크 구축으로 주민 밀착형 문화서비스 제공

○ 지역 고유의 정체성과 차별성을 확보한 문화복지 기반 조성으로 관광·교육·경제 활성화 도모

○ 주민이 문화의 소비자이자 생산자로 발전할 수 있는 기반 마련

부산시	재정혁신담당관	과장	남정은	2070	공공기관혁신팀장	김종식	2103	담당자	이혜연	051.888.2107
남구	문화미디어과	과장	김미선	4060	문화예술팀장	최의채	4063	담당자	성지은	051.607.4062