		[ 정성과 행복행정 ] 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호
4-3		이용자 눈높이에 맞는 체육시설 설치
		[ 관광체육과 ]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○		○		○				○

□ 사업목표

○ (조명시설 추가설치) 조명시설이 없는 체육시설 구역에 조명을 설치하여 저녁 후 체육활동 수요 충족 및 쾌적한 환경 조성

○ (테니스구장 인조잔디 설치) 백운포체육공원 테니스장의 바닥면이 마사토로 되어있어 이를 인조잔디로 교체하여 쾌적한 스포츠 환경 조성

□ 사업개요

○ 조명시설 추가설치

▷ 사 업 명 : 백운포체육공원 인조2축구장 조명탑 설치공사

▷ 규    모 : 조명폴(H=21.3m, 평균조도:500lx) 4기, 전기공사 1식

▷ 총사업비 : 600백만원(특별교부세:500, 시비:100)

▷ 사업기간 : 2021. 11 ~ 2022. 08.

○ 테니스구장 인조잔디 설치

▷ 사 업 명 : 백운포체육공원 테니스장 인조잔디 설치

▷ 규    모 : 인조잔디 설치(A=5,124㎡)

▷ 총사업비 : 600백만원(특별교부세 600)

▷ 사업기간 : 2022. 07 ~ 2023. 02.

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
인조2축구장 조명탑 설치	공사 준공	공사 준공	-	-	-	-
테니스구장 인조잔디 설치	공사 준공	공사 착공	공사 준공	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	1,200	620	580
국비
시비	100	100
구비
기타	1,100	520	580
※ 기타내역 : 특별교부세 500백만원, 특별조정교부금 600백만원

□ 추진사항

○ 조명시설 추가설치 공사 준공

▷ 사 업 명 : 백운포체육공원 인조2축구장 조명탑 설치공사

▷ 위    치 : 남구 백운포로 108(용호동) 백운포체육공원

▷ 규    모 : 조명폴(H=21.3m, 평균조도:500lx) 4기, 전기공사 1식

▷ 총사업비 : 600백만원(특별교부세:500, 시비:100)

▷ 공사기간 : 2022. 5. 2. ~ 8. 24.

※ 준공식 개최 - ‘22. 8. 26.(금) 19:00 ~ 20:30

○ 테니스구장 인조잔디 설치

▷ 2022. 10. 3. 테니스구장 인조잔디 설치 설계용역 완료

▷ 2022. 10. 공사 계약심사 및 입찰 공고

▷ 2022. 12. 공사 착공

□ 향후계획

○ 테니스구장 인조잔디 설치

▷ 2023.  3. 공사 준공

□ 기대효과

○ 저녁 후 체육활동 수요 충족 및 쾌적한 체육시설 환경을 조성하여 야간 이용객 만족도 증대

○ 주민들에게 쾌적한 시설로서 많은 대관이 가능함에 따라 이용객 만족도 및 대관 수익 증대

남구	관광체육과	과장	김민채	4820	체육지원팀장	권오성	4373	담당자	김동민	051.607.4374

▼  위치도 : 백운포체육공원 인조2축구장 조명탑(남구 백운포로 106 일원)

▼  위치도 :　백운포체육공원 테니스구장 인조잔디(남구 백운포로 106일원)