		[ 소통과 투명행정 ] 15분 생활권 인프라 확충
1-3		주거지 주차장 확충
		[ 교통정책과 ]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○

□ 사업목표

○ 주택 밀집지역 내 주차공간 확보를 통한 주차 편의성 제고

□ 사업개요

○ 노외 공영주차장 조성(완료)

▷ 문현1동 제3공영주차장 : 지평식 14면(2021. 9. ~ 2022. 11.)

※ 총사업비 1,776백만원(전액 구비)

▷ 용호1동 제4공영주차장 : 지평식 17면(2020. 2. ~ 2023. 1.)

※ 총사업비 1,563백만원(국 779, 시 312, 구 472)

▷ 무가선 저상트램 실증노선 대체주차장 : 지평식 75면(2022. 1. ~ 2023. 3.)

※ 총사업비 850백만원(市 재배정)

○ 노외 공영주차장 조성(추진중)

▷ 감만2동 제3공영주차장 : 철골식 46면(2021. 12. ~ 2024. 6.)

※ 총사업비 3,100백만원(국 1,550, 시 620(미확보), 구930)

▷ 용당동 제1공영주차장 조성 사업 : 지평식 18면(2022. 8. ~ 2024. 12.)

※ 총사업비 1,500백만원(시 1,050, 구 450)

▷ 대연5동 제1공영주차장 조성 사업 : 지평식 주차장 13면(2022. 8. ~ 2024. 6.)

※ 총사업비 2,000백만원(시 1,400, 구 600)

○ 그린주차사업(내집마당) 추진

▷ 사업내용 : 주택 내 여유공간을 활용하여 주차장을 조성하는 가구에 대해 보조금 지원

▷ 지원규모 : 가구당 최고 4백만원 한도 내 설치비의 70% 지원

○ 부설주차장 무료개방 지원사업 추진

▷ 사업내용 : 무료로 주차장을 개방하는 공공기관 및 단체 등에 시설개선비 지원

▷ 지원규모 : 개소당 최고 8백만원 한도 내 사업비의 90%지원

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	공영주차장 준공 (2개소)	토지매입 및 용역추진	공사착공 및 준공	-	-
	신규 주차장 대상지 발굴	신규 주차장 대상지 발굴
그린주차사업	가구 내 주차장 설치	사업 신청 접수 및 지원	사업 신청 접수 및 지원	사업 신청 접수 및 지원	사업 신청 접수 및 지원
부설주차장 무료개방 지원 사업	부설주차장 개방	사업 신청 접수 및 지원	사업 신청 접수 및 지원	사업 신청 접수 및 지원	사업 신청 접수 및 지원

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	12,150	96	2,526	3,336	3,096	3,096
국비
시비	7,550	56	1,386	1,796	2,156	2,156
구비	4,600	40	1,140	1,540	940	940
기타

□ 추진사항

○ 문현1동 제3공영주차장 조성

- 2022. 3. : 부지매입 완료

- 2022. 7. : 공사 착공

- 2022.11. : 공사 준공

- 2022.12. : 주거지주차장 개방(14면)

○ 용호1동 제4공영주차장 조성

- 2022. 1. : 미매입 필지 토지 소유주 도시계획시설사업 결정 취소 행정소송 제기 및 집행정지 신청

- 2022. 3. : 기매입 2필지에 대한 부분공사 준공

- 2022. 4. : 용호1동 제4공영주차장 임시 운영

- 2022.11. : 기매입 2필지에 대한 마무리 공사 재개

- 2023. 1. : 기매입 2필지에 대한 마무리 공사 준공

○ 무가선 저상트램 실증노선 대체주차장 조성

- 2021.10. : 도시철도 부대편의시설 조성사업 재배정 알림(市→區)

- 2022. 1. : 도시계획시설(하수도)사업 실시계획 인가 고시 및 공사착공

- 2022. 2. : 현황조사 및 지장물 이설 협의

- 2023. 3. : 토목공사 준공 및 준공검사 완료

- 2023. 4. : 전기공사 준공 및 준공검사 완료

○ 감만2동 제3공영주차장 조성

- 2022. 5.~ : 토지매입 협의 중

- 2022. 7.~11.  : 기본설계용역 실시 및 주민설명회 개최

○ 용당동 제1공영주차장 조성

- 2022. 8. : 용당동 공영주차장 조성 검토, 공유재산심의회 원안 가결

- 2022. 9. : 공유재산 관리계획 원안 가결

- 2023. 1. : 시비보조금 일부(0.7억) 확보

- 2023. 5. : 구비 추경예산 편성

○ 대연5동 제1공영주차장 조성

- 2022. 8. : 대연5동 공영주차장 조성 검토, 공유재산심의회 및 재정심의회 원안 가결

- 2022. 9. : 공유재산 관리계획 원안 가결

- 2023. 1. : 시비보조금 일부(12.6억) 확보

- 2023. 5. : 사업 대상지 변경 검토 보고, 구비 추경예산 편성

- 2023. 6. : 공유재산 관리계획 변경 원안 가결

○ 그린주차사업(내집마당) 추진

- 2023. 3.  : 추진계획 수립

- 2023. 3.~ : 그린주차사업 홍보 및 신청 접수 중(2건 완료)

○ 부설주차장 무료개방 지원사업 추진

- 2023. 1.  : 추진계획 수립

- 2023. 2.~ : 부설주차장 무료개방 지원사업 홍보 및 신청 접수

- 2023. 3.  : 지원대상 선정(2개소: 산성교회, 배정미래고등학교 )

- 2023. 4.  : 지방보조금관리위원회 심의 통과

- 2023. 5.  : 부설주차장 무료개방 협약체결(구 ↔ 산성교회, 배정미래고등학교)

- 2023. 6.  : 산성교회 부설주차장 개방 완료(12면)

□ 향후계획

○ 감만2동 제3공영주차장 조성

- 2023.  7. ~ 2023. 12. : 실시설계용역 실시 및 토지 손실보상 절차 이행

- 2023. 12. ~ 2024.  6. : 공사 착공 및 준공

○ 용당동 제1공영주차장 조성

- 2024. 1. ~ 2024. 4. : 부지매입 완료

- 2024. 5. ~ 2024. 7. : 실시설계용역 실시

- 2024. 8. ~ 2024.12. : 공사 착공 및 준공

○ 대연5동 제1공영주차장 조성

- 2023. 6. ~ 2023.10. : 부지매입 추진

- 2023.11. ~ 2024. 1. : 실시설계용역 실시

- 2024. 2. ~ 2024. 6. : 공사 착공 및 준공

○ 그린주차사업(내집마당) 지원사업 : 연간 20세대 20면 목표

○ 부설주차장 무료개방 지원사업 : 연간 20면 이상의 주차공간 확보 목표

□ 타기관과의 협조사항

○ 공영주차장 조성 및 그린주차 사업은 시비 보조금 사업 대상으로 시비 예산 편성 요청 필요

□ 기대효과

○ 주차수요가 큰 주택가 밀집지역의 주차공간 확충을 통해 주민편의를 증진하고,불법주차를 해소함으로써 선진 주차질서 확립

부산시	공공교통정책과	과장	이용창	3920	주차기획팀장	김희중	3933	담당자	변재욱	051.888.3934
남구	교통정책과	과장	김은주	4550	교통행정팀장	김석순	4553	담당자	김영록	051.607.4556