		[ 소통과 투명행정 ] 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선
2-2		동천․남천․대연천 수질 개선 방식 제고
		[ 건설과 ]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○

□ 사업목표

○ 도시하천 수질개선을 통한 쾌적한 생활환경을 조성

□ 사업개요

○ 유지용수 공급시설 관리 (계속 사업)

▷ 대연천내 유지용수 공급을 위한 시설 유지관리 1식, 구비 220백만원(전기, 통신 포함)

○ 우․오수 분류관거 사업 조속 추진

▷ 우암초등학교 및 섶자리길일원, 분류식화 지역내 배수설비 정비공사 시행, 시비 8,710백만원

○ 대연천 수질개선

▷ 대연천 유수정체 구간에 대한 수질개선 장치 설치, 구비 100백만원

□ 추진계획

○ 2021.12. ~ 2022.12. : 우암초등학교, 섶자리길 일원 등 분류식 오수관거 설계용역 시행

○ 2022. 9. ~ 2023.12. : 대연천내 산소공급시설 실증사업 및 확대 설치

○ 2023. 5. ~ 2026.12. : 분류식 오수관거 공사 시행

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
대연천 수질개선 사업	산소공급시설 설치	산소공급시설 설치	-	-	-	-
우․오수 분류관거 사업	공사 준공	용역 추진	공사 착공	공사 추진	공사 추진	공사 준공

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	10,640	680	4,290	2,720	2,730	220
국비
시비	9,440	360	4,070	2,500	2,510
구비	1,200	320	220	220	220	220
기타
※ 유지용수 공급시설(전기, 통신 등) 관리(구비 220백만원, 계속사업)

□ 추진사항

○ 2022.09. 분류식화 지역내 배수설비 설계용역 준공

▷ 진남로46번길 일원 외 1개구간, 용호초등학교 일원 외 1개구간

○ 2022.11. 대연천 수질개선 실증사업(에어로사이드 수처리공법)

▷ 대연천내 산소공급시설 설치 및 시험가동

○ 2022.12. 분류식 오수관거 기본 및 실시설계용역 준공

▷ 섶자리길 일원, 우암초등학교 일원

○ 2023.05.~ 분류식 오수관거 신설공사 공사 및 용역 시행중

▷ 우암초등학교 일원 하수관로 신설공사(1차)

▷ 섶자리길 일원 하수관로 신설공사

▷ 수영로219번길 일원 분류식화 지역내 배수설비 정비공사

▷ 하수관로 신설공사(우암초 외 2개소) 건설사업관리용역

○ 2022.12. ~ 2023.05. 대연천 산소공급시설 설치관련 수질검사 (총6회-월1회)

▷ 수질검사 결과 등을 통해 산소공급시설 확대 설치여부 검토 중 (‘23년 하반기)

○ 2023.05. 분류식 오수관거 신설 공사 추진 및 건설사업 관리용역 착공(~ 2024.05.)

▷[우암초(1차), 섶자리길, 수영로219번길 일원]

□ 향후계획

○ 2024.06.~2026.06. 우암초등학교(2차, 3차) 분류식 오수관거 신설공사 착공 및 준공

□ 타기관과의 협조사항

○ 2023년 예산교부현황(市 하수도특별회계 재배정)

▷ 우암초등학교 일원 하수관로 신설공사 : 1,500백만원

▷ 섶자리길 일원 하수관로 신설공사 : 1,870백만원

▷ 수영로219번길 일원 분류식화 지역내 배수설비 정비공사 : 700백만원

□ 기대효과

○ 누구나 즐기며 공감하는 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

○ 자연친화적 생태하천 조성을 통한 지역경제 활성화 기여

부산시	공공하수인프라과	과장	권순갑	3730	하수관리팀장	박봉근	3773	담당자	김상태	051.888.3752
남구	건설과	과장	조용호	4660	하수팀장	박경도	4683	담당자	손종철	051.607.4682