		[ 소통과 투명행정 ] 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선
2-5		용호동 삼성시장 일원 상습침수 해소
		[ 건설과 ]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○

□ 사업목표

○ 용호동 삼성시장 일원은 용호천(비법정하천)보다 낮은 저지대로 집중호우 시 우수관로 통수 부족으로 주택 침수가 발생함에 따라 하수도정비 중점관리지역으로 지정하여 하수시설을 확충함으로써 상습침수를 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 용호동 일원 하수암거 신설 및 개량

▷ 하수암거 신설 ☐1.5×1.5 ~ 4.0×2.0, L=615m

▷ 하수암거 개량 ☐1.0×1.0 ~ 4.0×2.0, L=2,622m

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
하수도 정비 사업 추진	공사 착공	·하수도 정비 대책 승인 ·용역 착수	용역 추진	공사 착공	공사 추진	공사 준공

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	15,700		1,300	4,400	5,000	5,000
국비	4,700		500	1,300	1,450	1,450
시비	5,500			1,900	1,800	1,800
구비	5,500		800	1,200	1,750	1,750
기타

□ 추진사항

○ 2020.12.  용호동 삼성시장 일원 침수원인분석 및 저감대책 수립용역 완료(안전총괄과)

- 사업규모 : 하수박스 신설(L=655m), 측구 개선(L=1,424m), 고지배수로 설치(L=1,010m) 등

○ 2021.11.  용역결과에 따라 「하수도정비 중점관리지역」지정(건설과)

○ 2022.09.  2022년도 제2회 추경 편성(구비 200백만원)

○ 2022.11.  용호동 일원 하수도 정비사업 기술용역 발주계획 심의 완료

○ 2022.12.  PQ기준 심사 및 계약심사, 사업수행능력평가 입찰공고

○ 2023.01. 사업수행능력평가 및 가격입찰, 용역 계약

○ 2023.02. 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2024. 02. 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2024. 03. ~ 2026. 12. : 하수도 정비공사 시행

□ 타기관과의 협조사항

○ 하수도 정비사업 기본 및 실시설계를 위한 23년 예산 확보 현황

▷ 국비 500백만원(환경부)
▷ 특별교부세 용도변경 교부 800백만원(행안부→환경부)

□ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 기대효과

○ 하수도 중점관리지역으로 지정된 남구 용호동 일원 내 하수시설 신설 및 개량을 통한 침수해소로 지역 주민의 생활환경 개선 및 재산 보호

부산시	공공하수인프라과	과장	권순갑	3730	하수관리팀장	박봉근	3773	담당자	김상수	051.888.3772
남구	건설과	과장	조용호	4660	하수팀장	박경도	4683	담당자	손종철	051.607.4682

▼ 위치도
▼ 현장사진