		[ 돌봄과 회복행정 ] 따뜻한 동행, 아이키우기 좋은 남구
5-3		꿈나무지원복합센터 건립 조속추진
		[ 여성아동과 ]

사업기간		사업유형		예산구분		사업주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	남구	기타
○			○	○				○

□ 사업목표

○ 어린이집 및 보호자의 양육 지원을 통합한 ONE-STOP서비스 제공

○ 종합적인 보육·교육 인프라 구축을 위한 거점센터 건립

□ 사업개요

○ 위    치 : 남구 대연동 317-5번지 등

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2025년

○ 규    모 : 대지면적 2,041㎡, 연면적 3,800.06㎡, 지하1층, 지상4층

○ 소요예산 : 소요예산 : 15,668백만원(국비 1,676, 시비 1,119, 구비 12,873)

※ 부지매입비 반영

□ 연차별 추진계획

세부사업명	공약달성 확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
꿈나무지원 복합센터 조속 건립	꿈나무지원 복합센터 개관	기본 및 실시설계	공사 착공	공사 추진	준공 및 개관	-

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026
합계	15,668	4,274	3,018	2,644	3,332	2,400
국비	1,676	1,256	370	50
시비	1,119	85	524	510
구비	8,473	2,933	124	2,084	3,332
기타	4,400		2,000			2,400

□ 추진사항

○ 2019. 06.  : 부지확정, 건립 추진계획 수립

○ 2020. 09.  : 2021년도 생활SOC 복합화사업 공모 선정

○ 2020. 12.  : 육아종합지원센터 국비 확보(10억)

○ 2021. 05.  : 하나금융 국공립어린이집 사업 선정(24억)

○ 2022. 01.  : 설계공모(2022.4. 당선작 선정)

○ 2022. 05.  : 기본 및 실시설계 착수

○ 2022. 08.  : 기본 및 실시설계 용역 중간보고회

○ 2022. 12.  : 설계 경제성 검토(VE) 신청

○ 2023. 01.  : 부산광역시 & 강서구 육아종합지원센터 벤치마킹

○ 2023. 02.  : 설계의 경제성(VE) 등 검토 추진(2/8, 2/15, 2/22, 3/2)

건립부지 내 석면 철거

○ 2023. 04.  : 건설기술심의 접수

BF, 건축물에너지효율등급, 녹색건축 예비인증 접수

○ 2023. 05.  : 건설기술심의 완료(설계심의 : 조건부채택, 공사기간 산정 : 적정)

녹색건축, 에너지효율등급 인증 완료(예비인증)

○ 2023. 06.  : 건축허가 및 실시계획인가 접수(건축과),

제로에너지건축물 인증 완료(예비인증)

□ 향후계획

○ 2023. 07.  : 에너지절약계획서 작성 및 BF 예비인증 획득

기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2023. 10.  : 공사 착공(2025년 준공)

□ 기대효과

○ 보육관련 정보수집·제공 및 보육컨설팅, 가정양육자에 대한 육아 정보 제공

○ 아동의 육체·정서·사회적인 건강한 성장을 위해 양육자간의 정보공유 및      아동 돌봄 사각지대 해소를 위한 안정적인 방과 후 환경조성

부산시	출산보육과	과장	원세연	1560	보육행정팀장	이숙임	1573	담당자	허성필	051.607.1574
남구	여성아동과	과장	김경혜	4350	보육팀장	옥경순	4343	담당자	이주연	051.607.4346

▼  위치도

▼ 조감도(설계공모 당선작)