특  수  공  시

2009년 지방재정 특수공시 심의 선정사업

【기준년도 : 2008년도】                                       (단위 : 억원)

선정순위	사 업 명	사 업 개 요	총 사 업 비	분 야 별	비 고
계	총 11건		333
1	남구국민체육센터 건립	- 연면적 5,439㎡ (지하1, 지상3) - 2006 ~ 2009	108 (기 30, 시 30, 구 48)	체 육
2	남구 노인복지관 건립	- 연면적1,697㎡ (지하1, 지상3) - 2007 ~ 2009	45 (시 20, 구 25)	복 지
3	대학로 문화거리 조성 사업	- L=2,000m - A=5,000㎡ - 2008 ~ 2010	55 (국 27, 시 14, 구 14)	문 화
4	이기대 ~ 백운포간 친수시설 조성사업	- L=3,950m	35 (국 21, 시 14)	해 양
5	대연 수목전시원내 생태하천 복원사업	- L=450m - PC박스 설치 L=494m	23 (시비 23)	수질환경
6	부산남구 교육인적자원 개발 벨트 사업	- 52개 초중고 - 5개대학교 - 유관기간 등(계속)	27 (국 23 구 4)	교 육

1. 남구 국민체육센터 건립

실 태		종합체육시설이 없어 구민의 체육활동 범위 제한

추진방향		현대식 체육센터 건립으로 구민의 체육활동 인프라 구축

사 업 개 요

위    치 : 남구 용호동 895-3번지(백운포 체육공원내)

사업기간 : 2006년～2009년

사업규모 : 연면적 5,439㎡(지하1층, 지상3층)

사 업 비 : 108억원(기금 30억, 시비 30억, 구비 48억)

주요시설 : 수영장, 다목적체육관, 헬스장, 강당 등

사업진행 현황

2006년 10월 국민체육진흥기금 30억원 협약체결 확보

2007년 12월 ~ 2008년 10월까지 설계심사 및 실시설계 용역 추진

2008년 12월 시공자 선정과 공사 시작하여 2009년 12월 준공 후

2010년부터 구민에게 서비스를 제공할 계획임

조 감 도

공사중 전경사진

2. 남구 노인복지관 건립

실 태		급속한 노령화로 노인 여가 및 복지시설 부족

추진방향		노인복지 실현을 위한 현대식 전문 서비스 시설 확충

사 업 개 요

위    치 : 남구 대연동 1346번지 일원

사업기간 : 2007년 ~ 2009년

사업규모 : 연면적 1,697㎡(지하 1층, 지상 3층)

사 업 비 : 45억원(시비 20억, 구비 25억)

주요시설 : 다목적실, 자원봉사실, 물리치료실, 강당 등

사업진행 현황

2007년 12월 부지매입 확보

2008년 7월부터 2008년 12월까지 기본 및 실시설계용역 추진

2008년 12월 시공사 선정후 2009년 1월부터 공사를 시작하여

2009년 12월 준공 후 2010년부터 65세 이상 노인에게 복지

서비스를 제공할 계획임.

조 감 도

공사중 전경사진

3. 남구 대학로 문화거리 조성 사업

실 태		지역 주민과 대학간의 담장 허물기, 공공디자인 개선 등으로 문화거리 조성 필요

추진방향		공공시설물 정비, 친환경 문화공간조성으로 삶의 질 향상

사 업 개 요

위    치 : 남구 대연동 용소삼거리 ~ 구 차량등록사업소

사업기간 : 2008년 ~ 2010년

사업규모 : L=2,000m, A=5,000㎡

사 업 비 : 55억원(국비 27억, 시비 14억, 구비 14억)

주요시설 : 녹색가로 주민쉼터, 경관조명 및 테마거리 조성 등

사업진행 현황

2008년  4월 도시경관 조성사업 승인(부산시)

2008년 12월 시비 5억원 및 구비 2억원 확보

2009년  2월 부경대 담장가꾸기 사업 기본 및 실시설계 착수

후 5월 설계 완료, 6월 공사 착공, 10월 준공 후 구민에게 문화

거리 개방 계획임.

조 감 도

공사중 전경사진

4. 이기대 ~ 백운포간 친수시설 조성 사업

실 태		자연경관의 수려함으로 관광객이 급증하나 이용시설이 없어 불편

추진방향		친수 시설 조성으로 연안 침식 방지 및 관광객 편의 도모

사 업 개 요

위    치 : 남구 이기대 도시자연공원 연안 일원

사업기간 : 2006년 ~ 2011년

사업규모 : 친수시설조성(산책로) L=3,950m

사 업 비 : 35억원(국비 21억, 시비 14억)

주요시설 : 산책로, 연안정비 등

사업진행 현황

2007년 11월 연안정비 사업 실시계획 승인(국토해양부)

2008년 2월 ~ 12월 1차공사 준공(L=1840m)

2008년 11월 2차 공사 착공하여 2009. 9월 공사 준공

(L= 2,110m) 후 총연장 L=3,950m 주민 및 관광객에게

이용 계획

위 치 도

공사 중 현장사진

5. 대연 수목전시원내 생태하천 복원사업

실 태		인근 오․폐수 유입으로 주변 평화공원 이미지 훼손

추진방향		석축 개거를 생태하천으로 조성하여 구민에게 휴식 및 학습 공간 제공

사 업 개 요

위    치 : 남구 UN기념공원 남쪽  대연수목원내 개거

사업기간 : 2007년 ~ 2009년

사업규모 : 생태하천조성 L=450m, PC박스 설치 L=494m

사 업 비 : 23억원(시비 23억)

주요시설 : 생태연못, 휴식 및 관찰 공간 등

사업진행 현황

2007년 9월 기본 및 실시설계 용역

2008년 8월 공사착공(1차공사) 하여 2009년 3월 준공

2009년 3월 2차 공사 착공, 11월 공사 준공 후 구민에게 생태

하천 개방 계획

.

조 감 도

위 치 도

6. 부산남구 교육인적자원 개발벨트사업

목 적		지역과 교육 협력모델로서 공교육 지원 및 학부모 사교육비 경감을 통한 지역교육공동체 형성으로 교육특구 남구 조성

추진방향		지역 우수인력 및 자원을 활용한 방과 후 학교 지원과 사회적 일자리 창출로 지역 경쟁력 강화

사 업 개 요

사업기간 : 2007년 9월 ~ 계속

참여기관 : 구, 교육청, 52개 초, 중, 고교, 5개 대학교 및 유관기관 등

참여인원 : 22,000여명

프로그램 : 총 3대 영역 44개 프로그램 (2007.~2009. 현재까지)

추진 현황

2007년 9월  부산남구 교육인적자원개발벨트사업 선포식 개최

2007년 9월~2008년 4월  1차년도 사업 시행(37개 사업, 국비 20억)

2008년 6월  교육과학기술부 RHRD 사업시행 지자체로 재선정

2008년 7월~2009년 2월  2차년도 사업시행(4대 과제, 353백만원)

2009년 2월  교육과학기술부 RHRD사업시행 지자체로 재선정

2009년 4월~현재  3차년도 사업시행(3대 과제, 379백만원)을 추진

하고 있습니다.

※ 3대과제

1. 기초학습부진아 등을 위한 대학생․고학력 전문인력 여성멘토링 1:1 교사제

2. BNBS(Busan-Namgu Book Start)운동 확산을 위한 도서관 전문인력 양성 운영

3. 고학력 경력단절 방과후 전문인력 양성교육 및 프로그램 지원

10. 평생학습 도시 선포식     지역인재 육성사업

과학강사 교육프로그램    대학생 멘토링 1:1 교사제