특 수 공 시

2010년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2009년도】                                           (단위 : 억원)

우선 순위	사 업 명	사 업 개 요	총 사 업 비	분 야 별	비고
계	총 12건		350
1	남구 국민체육센터 건립	- 지하1, 지상3 (5,558㎡) - 2006년～2010년 1월	108 (국30, 시30, 구48)	문화및관광
2	남구 노인복지관 건립	- 지하1, 지상3 (1,697㎡) - 2006년～2009년	45 (시 20, 구 25)	사회복지
3	장애인 데크 등산로 조성사업	- 연장 382m, 휴게데크 10 - 2009년 6월～9월	5 (시비 5)	문화및관광
4	자전거 전용도로 개설	- L=1,950m B=1.2～2.5m - 2009년 2월～5월	5 (시비 5)	수송및교통
5	부경대 담장허물기 사업	- 담장철거 661m - 2008년～2009년	11 (시 9, 구 2)	국토 및 지역개발
6	대연수목원전시원내 생태하천 복원사업	- L=450m, 용수순환시설 - 2007년～2010년 3월	23 (시비 23)	문화및관광
7	대연3동 송선마을 침수지 해소	- L=633m A=376㎡ - 2009년～2012년	73 (국35, 시35, 구3)	공공질서 및 안전
8	우암동 국민의 숲 조성사업	- 23,079㎡ 조성 - 2010년 5월～8월	24 (국7.5, 시16.5)	문화및관광
9	용호5구역 주거환경개선사업	- L=154m B=67m - 2006년～2012년	50 (국25, 시10, 구15)	국토 및 지역개발
10	남구대학로 간판이 아름다운시범거리조성사업	- 건물 41동, 업소 216개 - 간판 1,302개	6 (국 1, 시 1, 교 3, 구 1)	국토 및 지역개발

남구 국민체육센터 건립

	【 사 업 개 요 】
○ 위 치 : 부산광역시 남구 용호동 895-3번지(백운포 체육공원내) ○ 사업기간 : 2006년 ～ 2010년 1월 ○ 사업규모 : 대지면적 10,900㎡, 건물 5,558.87㎡(지하1층/지상3층) ○ 총사업비 : 108.4억원【국비 30억, 시비 30억, 구비 48.4억(지방채30억)

ꏚ 사업의 필요성 및 효과

○ 구민 건강증진과 다양한 여가 공간 제공으로 생활체육 저변 확대

○ 백운포 체육공원 주변의 생활환경 개선

ꏚ 사업진행 현황

○ ‘06.10 : 국민체육센터 건립 기금지원 협약 체결 ▷ 30억원

○ ‘07.11 : 설계경기 심사작 결정 및 설계용역 계약

○ ‘08.09 : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ ‘08.12 : 공사계약 ▷시공자 : 동신종합건설(주)

○ ‘09.01 : 공사착공

○ ‘10.01 : 준공

남구노인복지관 건립

	【 사 업 개 요 】
○ 위 치 : 부산시 남구 대연5동 1346번지 ○ 사업규모 : 부지면적 1,405㎡, 건축연면적 1,697㎡(지하1층/지상3층) ○ 총사업비 : 45억원【시비 20억, 구비 25억】 ○ 사업기간 : 2006. 10월 ~ 2010. 2월

ꏚ 사업의 필요성 및 효과

○ 급속히 진행되는 노령사회를 대비하여 노인복지여가시설 필요

○ 노인의 건강증진, 교양, 오락 등 복지증진에 필요한 편의제공

ꏚ 사업진행 현황

○ ‘06. 10 : 구정조정위원회 심의 및 부지취득 승인

○ ‘08. 07 : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ ‘09. 01 : 건축분야 공사계약체결 ▹ (주)석포종합건설

○ ‘09 .02 : 착공(기존 건축물 철거)

○ ‘10. 02 : 준공

장애인 데크 등산로 조성사업

	【 사 업 개 요 】
◯ 위 치 : 대연동 1573-8번지 부산혜남학교 뒤 ◯ 사업규모 : 목재데크 램프웨이 조성 - 연장382m(폭1.94m) 피양데크 및 휴게데크 10개소 ◯ 사 업 비 : 금 494,998천원(도급303,203 관급162,907 설계28,888) ◯ 공사기간 : 2009. 06. 12. ~ 2009. 09. 30.

ꏚ 사업의 필요성 및 효과

○ 장애인 및 노약자들에게 자연을 접할 수 있는 기회를 제공하고       심신 수련의 공간으로 이용될 수 있도록 함.

ꏚ 사업진행 현황

○ 2009. 02. 02. : 부산시 교육청 토지사용 동의

○ 2009. 02. 27. : 실시설계 용역시행 ▷두인디앤씨(대표:차욱진)

○ 2009. 03. 05. : 학부모, 학생 등 의견수렴 및 설명회 개최

○ 2009. 04. 20. : 중간보고회 개최

○ 2009. 04. 22. : 실시설계 용역완료

○ 2009. 04. 27. : 학부모, 학생 등 의견수렴 및 설명회 개최

○ 2009. 05. 18. : 市기술계약심사담당관실 공사계약심사 완료

○ 2009. 06. 09. : 공사계약 체결 ▷국일산업(대표:김을용)

○ 2009. 06. 12. : 공사 착공

○ 2009. 09. 30. : 공사 완료

○ 2009. 10. 16. : 학부모, 학생 등 의견수렴 및 설명회 개최

≪장애인 데크 등산로 조성사진≫

장애인 등산로 조성사진(원경)

장애인 등산로 조성사진(근경)

자전거 전용도로 개설

	【 사 업 개 요 】
○ 위 치 : 남구 대연동 용소삼거리～LG메트로시티～메가마트 ○ 규 모 : 자전거전용도로 L=1,950m, B=1.2~2.5m ○ 총사업비 : 500백만원(도급 151 관급 299 폐기물 50) ○ 사업기간 : 2009. 2. 6. ～ 5. 18.

ꏚ 사업진행 현황

○ 2008.  8월 : 자전거 시범도로 대상지 확정

○ 2008. 10월 : 예산재배정

○ 2009.  1월 : 공사 발주

○ 2009. 2. 6. : 공사 착공

○ 2009. 5.18. : 공사 준공

부경대 담장허물기 사업

	【 사 업 개 요 】
○ 위 치 : 남구 대연동 599-1번지(부경대 일원) ○ 사업개요 : 담장철거(661m), 데크 및 조경공사, 주민편의시설 설치 ○ 총사업비 : 11억원(시비9, 구비2) ○ 사업기간 : 2008 ～ 2009

ꏚ 사업의 필요성 및 효과

○ 경성대․부경대 구간은 지하철 역세권으로 상권확대에 따른 유동

인구 급증으로 도시경관을 저해하는 공공시설물 정비필요

○ 폐쇄형 콘크리트 담장 철거 및 녹지공간 확충을 통해 삭막한 도시       공간을 산뜻하고 쾌적한 친환경 녹색 생활공간으로 재탄생

ꏚ 사업진행 현황

○ 2008.  10. 남구 대학로 문화거리 조성사업 계획수립

○ 2009.   1. 부경대 담장허물기 사업 협약 체결(남구 ↔ 부경대)

○ 2009.   2. 남구 대학로 문화거리 조성사업 설계용역 착수

○ 2009.4~6. 설계용역 보고회 개최(3회)

○ 2009.   6. 부경대 담장허물기 사업 착공

○ 2009.  10. 부경대 담장허물기 사업 준공

대연수목전시원내 생태하천복원사업

	【 사 업 개 요 】
○ 위 치 : 부산시 남구 대연동 대연수목전시원내 ○ 사업규모 : 생태하천조성 L=450m, 유지용수순환시설 1식 관목․초화․수생식물 식재 - 27종 46,000본 ○ 총사업비 : 22.6억원【시비 22.6억】 ○ 사업기간 : 2007. 9월 ~ 2010. 3월

ꏚ 사업의 필요성 및 효과

○ 대연수목전시원내 석축개거를 생태(자연형)하천으로 조성하여 평화공원, 대연수목전시원, UN기념공원을 찾는 이용객(관광객)에게 친수․휴식공간 및 생태학습장 제공

ꏚ 사업진행 현황

○ ‘07. 09 ~ ‘09. 02 : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ ‘08. 08 ~ ‘09. 03 : 1차 공사 완료

○ ‘09. 06 ~ ‘10. 03 : 2차 공사 완료(사업완료)

공사전		공사후

대연3동 송선마을 침수지해소

	【 사 업 개 요 】
○ 위 치 : 부산시 남구 대연3동 송선마을 주변 ○ 사업규모 : 암거설치 L=830m, 하상정비 A=1,850㎡(L=380m, B=4~6m) ○ 총사업비 : 72.5억원【국비 35억, 시비 35억, 구비 2.5억】 ○ 사업기간 : 2009. 2월 ~ 2012. 12월

ꏚ 사업의 필요성 및 효과

○ 상습침수지인 송선마을에 침수지해소공사 시행하여 침수피해 발생 예방 및 지역 주민들의 안정적인 생활여건 조성

ꏚ 사업진행 현황

○ ‘09. 02 ~ 06 : 대연천 호안정비공사 완료

▷ 호안정비 L=633m, 하상정비 A=376㎡

○ ‘09 .12 : 특별교부세 6억원 교부 결정

○ ‘10. 03 : 용역착수 (용역완료 예정 : ‘10. 09)

○ ‘10. 06 : 침수해소공사 착공 (공사준공 예정 : ‘10. 09)

▷ 하수BOX(2.0×1.0)설치 L=142m 등

호안 및 하상정비 완료		침수해소공사 현장사진

우암동 도시숲 조성공사

	【 사 업 개 요 】
○ 위 치 : 부산시 남구 우암동 127-142번지 일원 ○ 사업규모 : 23,079㎡ ○ 총사업비 : 24억원【국비 7.5억, 시비 16.5억】 ○ 사업기간 : 2010. 5월 ~ 2010. 8월

ꏚ 사업의 필요성 및 효과

○ 우암동 지역에 주택정비사업지내 위치한 국유지상 분묘문제 대두

○ 주택지 인근 방치된 국유림의 산림복원 및 웰빙 여건 조성

ꏚ 사업진행 현황

○ 2010. 2월  실시설계 용역 착공

○ 2010. 3월  주민설명회 및 市 도시녹화기술 심의

○ 2010. 4월  용역 준공 및 공사 발주

○ 2010. 5월  공사 착공

○ 2010. 8월  공사 준공

용호5구역 주거환경개선사업

	【 사 업 개 요 】
○ 위 치 : 부산광역시 남구 용호동 539-22번지 일원 ○ 사업기간 : 2006년 ～ 2012년 ○ 사업규모 : 도로개설 백운4길 L=95m, B=12m, 중흥길 L=59m, B=55m ○ 총사업비 : 약49.8억원【국비 24.9, 시비 9.9억, 구비 15억】

ꏚ 사업의 필요성 및 효과

○ 도시저소득 주민 밀집지역의 공공기반시설 정비로 쾌적한 주거환경 조성

○ 노후․불량주택 개량으로 삶의 질 향상 및 재해예방

ꏚ 사업진행 현황

○ ‘04.03. : 2단계 지구별 연차별 투자계획 확정

○ ‘08.05. : 진입도록 개설을 위한 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘08.10 : 도시계획시설(도로) 결정

○ ‘09.09 : 용호4․5구역 통합

○ ‘10.02 : 백운길 일부공사 시행완료 (L=15m, B=12m)

○ 현재 보상진행중

남구대학로 간판이 아름다운 시범거리 조성사업

	【 사 업 개 요 】
○ 구 간 : 용소삼거리 ~ 교통방송국(780m) ○ 규 모 : 41개 동, 216개 업소, (기존광고물 1,302여개 철거 및 496개 간판 제작․설치) ○ 기 간 : 2008. 1월 ~ 2009. 7월 ○ 내 용 : 불량․불법 간판을 작고 아름다운 LED 간판으로 교체 ○ 사업비 : 571백만원(특별교부세 278, 국비 100, 시비100, 구비 93)

ꏚ 사업의 필요성 및 효과

○ 아름답고 특색 있는 거리 조성으로 지역상권 활성화

○ 주민들의 인식전환과 관심유도로 바람직한 광고문화 정착

○ LED 조명 채택으로 에너지 절감 및 녹색성장 육성시책 동참

ꏚ 사업진행 현황

○ 2007. 11. : 대학로 도시경관 시범가로 광고물 정비계획 수립

○ 2007. 12. : '08년 간판시범사업 우수지자체 선정(행안부⇒구)

○ 2008. 04. :『간판이 아름다운 시범거리』조성사업 추진계획 수립,

옥외광고물 특정구역 지정고시

○ 2008. 06. : 주민설명회 개최, 주민자율추진협의회 구성(16명) 및

타 시․도 간판시범사업장 주민 견학

○ 2008. 07. : 옥외광고물 등 관리조례 개정, 간판 디자인 개발 및

실시설계 용역계약

○ 2008. 09. : 특별정비사업추진위원회(11명) 구성․운영

○ 2008. 12. : 간판 제작․설치 계약(조달청 긴급입찰)

○ 2009. 01. : 사업구간 내 혼잡전선 정비(08.12.~09.1)

○ 2009. 02. : 사업구간 가로수 전정공사(09.2.~3)

○ 2009. 01. ~ 07. : 간판 제작․설치 완료

관 련 사 진

前 : 남구 대연동 72-1 번지		後
		설치 후
前 : 남구 대연동 55-7 번지		後