특 수 공 시

2013년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2012년도】                                                   (단위 : 억원)

구분	사 업 명	사 업 개 요	총 사 업 비	담당자
계	총 16건		190.3
1	당곡공원 진입도로 개설	∙ L=260m, B=12m ∙ 2011년 ~ 2014년	50	기획감사실 최의채 (607-4045)
2	갈맷길 안내시설 설치	∙ 이정표168개, 안내판 10개소 등 ∙ 2012년	1.1	총무과 강현조 (607-4124)
3	남구 CCTV관제센터 구축	∙ A=379.2㎡ ∙ 2012년 ~ 2013년	13.6	재무과 허천식 (607-4149)
4	대동골문화센터 건립	∙ A=990㎡(지상2층) ∙2012년 ~ 2014년	32.7	문화체육과 정명선 (607-4064)
5	대연시장 화장실 보수공사	∙ 화장실 2개소 보수 ∙2012년 ~ 2013년	0.5	청소행정과 민남기 (607-4441)
6	스카이워크 설치	∙ A=1,594㎡ ∙2011년 ~ 2013년	14	공원녹지과 하창훈 (607-4541)
7	노후․미관저해 간판 교체사업	∙ 간판교체 61개소 ∙2012년	0.6	도시안전과 임성실 (607-4622)
8	도로조명 제어관리시스템 설치	∙관제시스템 설치 등 ∙2012년	2.5	도시안전과 김만조 (607-4674)
9	성모병원 ~ 해군공관 간 도로개설	∙L=540m, B=6~8m→12m ∙2011년 ~ 2014년	24.9	건설과 이영준 (607-4704)
10	이기대 ~ 백운포간 친수연안조성	∙안전난간 설치 등 ∙2007년 ~ 2013년	30.8	건설과 정대현 (607-4681)
11	문현4동 주민복합센터 신축	∙A=409㎡(지상3층) ∙2012년 ~ 2013년	8.6	건축과 도승희 (607-4714)
12	오륙도 해파랑길 광관안내소 건립	∙A=2,453㎡(지상2층) ∙2011년~2012년	11	시설관리사업소 이대희 (607-4931)

당곡공원 진입도로 개설

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : UN기념공원 주차장 ~ 당곡공원 기념관 입구 ❍ 규 모 : 도로개설(L=260m, B=12m) ❍ 사업내용 : 손실보상, 도로개설 ❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년 ❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국비1,000 지방비4,000)

사업의 필요성 및 효과

❍ 계획노선은 광안대로를 통해 당곡공원으로 진입하는 최단코스

❍ 인근 도로는 경사와 굴곡이 심하여 관광버스 등 대형차량 통행 불가

❍ 당곡공원 기념관 준공 이후 방문객 편익증진 및 인근 교통난 완화

사업진행 현황

❍ 2010. 9월 : 교통영향분석·개선대책 심의 의결(도로개설 조건부)

❍ 2012. 5월 : 도시관리계획(도로)결정(변경) 및 지형도면 고시

❍ 2012. 9월 : 기본 및 실시설계용역 준공

❍ 2013. 8월 : 도시계획시설사업 실시계획 열람공고

향후 추진계획

❍ 2014년 공사준공(예정)

관련사진
[조 감 도]
[위 치 도]

갈맷길 안내시설 설치

	【 사 업 개 요 】
❍ 사업기간 : 2012. 3월 ~ 12월 ❍ 사업내용 : 갈맷길 안내 시설물 및 안전시설 설치 ❍ 사 업 비 : 108,620천원(시비)

사업의 필요성 및 효과

❍ 갈맷길 내 이정표 등 각종 길안내시설 및 도보인증대, 포토존, 스토리텔링안내판, 추락방지시설 설치로 갈맷길의 완성도 제고

사업진행 현황

❍ ’12. 5월 : 갈맷길 종합안내도, 갈맷길 이정표(168개) 설치

❍ ’12. 9월 : 갈맷길 이정표 일련번호 표지판 부착(19개소)

❍ ’12. 12월 : 갈맷길 도보인증대 설치(3개소)

스토리텔링 안내판 설치(10개소)

갈맷길 포토존 설치 (5개소)

갈맷길 추락방지시설 설치 (천연목재 68경간)

관련사진

『남구 CCTV통합관제센터』구축

	【 사 업 개 요 】
❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2013년 ❍ 사업장소 : 남구 보건소 4층 대강당(379.2㎡) ❍ 사 업 비 : 1,362백만원(국비 633 시비 544 교육청 185) ❍ 사업내용 ▷ CCTV통합관제시스템(장비 및 솔루션) 및 통신망 구축 ▷ CCTV통합관제센터 인테리어 및 기반시설 구축

사업의 필요성 및 효과

❍ 기관(부서)별로 분산 설치․운영중인 공공목적의 CCTV(방범, 청소, 교통, 재난관리, 각급학교 등)를 통합 관제하여 안전한 생활환경 구축에 기여

사업진행 현황

❍ 2012.10월 : 2013년도 CCTV통합관제센터 구축 대상지로 선정(남구 등 4개구)

❍ 2013. 2월 : 남구 CCTV통합관제센터 구축 추진계획 수립

CCTV통합관제센터 구축 사업 설계용역 시행

❍ 2013. 3월 : CCTV통합관제센터 기반시설(전기, 통신) 구축공사 시행

❍ 2013. 4월 : CCTV통합관제센터 구축 설계용역 최종보고회

및 사업발주(부산지방조달청)

❍ 2013. 5월 : CCTV통합관제센터 기반시설(전기, 통신) 구축완료

❍ 2013. 6월 : CCTV통합관제센터 우선협상대상자와 추가협상 및 계약체결

향후 추진계획

❍ 2013. 7월 : CCTV통합관제센터 연계장비 설치 협의(관내 20개 초등학교)

❍ 2013. 7월 : CCTV통합관제센터 구축장소 현 시설물 철거작업

❍ 2013. 8월 : 착수보고회 및 추가 발주(항온항습기, UPS 등 장비구매)

❍ 2013.10월 : 남구 CCTV통합관제센터 구축 공사 완료 및 준공

❍ 2013.11월 : 『남구 CCTV통합관제센터』개소식

대동골문화센터 건립

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 대연동 245-170번지 일원 ▹ 일명 대동골(낙농부락) ❍ 부지면적 : 1,146㎡ ❍ 건축규모 : 1개동 지상2층, 연면적 990㎡ ❍ 주요시설 : 공연장, 전시장, 프로그램실, 작품활동실, 휴게시설 등 ❍ 사업기간 : 2012년~ 2014년 ❍ 사 업 비 : 3,273백만원(국비1,004 시비753 구비1,516)

사업의 필요성 및 효과

❍ 최근 대동골 인근에 공동주택 건립 등으로 주민수가 급격히 증가하였으나문화기반시설은 부족하여 문화소외지역으로 급변

❍ 황령산 터널위에 위치한 지리적 여건으로 교통상황이 열악하여 타지역의 문화시설이용에도 어려움이 따름

❍ 이에 남구 대연동 245-170번지 일원에 지역주민을 위한 문화센터를 건립하여 상대적으로 문화소외지역인 황령산 터널 일원 지역민의 삶의 질 향상과 복지증진에 기여

사업진행 현황

❍ 2012. 7월  : 국유지 매입 ▹ 2필지 1,060㎡ 매입

❍ 2013. 3월  : 도시관리계획(문화시설) 결정 ▹ 결정면적 : 1,146㎡

❍ 2013. 3월  : 묘지연고자 파악 및 부지내 무단경작지 정비

❍ 2013. 6월  : 토지손실보상 협의 ▹ 대연동 245-102번지외 3필지 113㎡

❍ 2013. 7월 : 기술용역 심의, 계약심사, 설계공모 공고

❍ 2013. 8월 : 건축설계 공모

향후 추진계획

❍ 2013. 9월 : 당선작 선정, 기본 및 실시설계용역 계약, 착공

❍ 2014. 1월 : 기본 및 실시설계용역 준공

❍ 2014. 2월 : 공사 및 감리용역 발주

❍ 2014. 3월 : 공사착공

❍ 2014.11월 : 대동골 문화센터 준공

관련사진
[위 치 도]
[현장사진]

대연시장 화장실 보수공사

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 대연동 1760-1번지 ❍ 규 모 : 대연시장 1․2층 화장실 2개소 ❍ 사업내용 : 화장실 전면 보수(양변기, 세면대 등 내장재 교체 및 벽면 도색, 입구 보수 등) ❍ 사업기간 : 2012.10.24.~2013.3.27. ❍ 사 업 비 : 50백만원(시비)

사업의 필요성 및 효과

❍ 대연시장 화장실 보수공사를 시행하여 시장상인 및 고객의 편의증진

❍ 쾌적한 시장 환경 조성을 통하여 전통시장 활성화에 기여

사업진행 현황

❍ 2012. 2월 : 대연시장 소규모 환경개선사업 신청

❍ 2012. 9월 : 소규모 환경개선사업비 확보(시비 50백만원)

❍ 2012.10월 : 공사 실시설계 용역 착수 ▷완료 2012.11월

❍ 2013. 1월 : 공사 경쟁입찰 공고

❍ 2013. 2월 : 공사 착공  ▷준공 2013. 3월

관련사진
사업 전			사업 후

스카이 워크 설치

	【 사 업 개 요 】
○ 위 치 ▷ 용호동 산196-1번지, 산202번지(승두말) ○ 규 모 ▷ 1,594㎡ ○ 사업내용 ▷ 스카이워크, 광장, 진입로, 조경 등 ○ 사업기간 ▷ 2011. 1월 ~ 2013. 9월 ○ 총사업비 ▷ 1,400백만원(국비 980, 시비 420)

사업의 필요성 및 효과

❍ 오륙도 및 주변 해양보호구역의 체계적 보전 및 관리

❍ 친수공간 조성으로 시민 휴식공간 및 해양자원 관광화

사업진행 현황

❍ 2011.  2월 : 스카이워크 설치사업 추진계획 수립(구청장)

❍ 2011.  5월 : 스카이워크 설치사업 자문회의 개최

❍ 2011. 10월 : 스카이워크 디자인 작품 공모 및 심사

❍ 2011. 12월 : 타 지자체 시설견학(강원 정선 변방치스카이워크)

❍ 2012.  1월 : 스카이워크 설계용역 착수

❍ 2012.  6월 : 문화재 보호구역 현상변경 허가승인(문화재청)

❍ 2012.  7월 : 설계용역 완료 및 공사계약 심사 완료(부산시)

❍ 2012.  8월 : 도시계획시설사업 실시계획인가 완료(부산시)

❍ 2012.  9월 : 부산시 도시디자인 자문 및 토목(구조물)분야 착공

❍ 2012. 11월 : 군 시설 철거 및 구조물 매립 터파기

❍ 2013.  6월 : 구조물 설치 및 광장 및 진입도로 공사(전체 공정 85%)

향후 추진계획

❍ 2013.  9월 : 공사 완공 및 준공식

관련사진
【조 감 도】
[위 치 도]

노후․미관저해 간판 교체 사업

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 수영로 208번길 54 외 40개 업소 ❍ 규 모 : 61개 간판 교체(가로간판 39개, 돌출간판 22개) ❍ 사업내용 : 노후․미관저해 간판 교체 ❍ 사업기간 : 2012.4월~2012.11월 ❍ 총사업비 : 61백만원(시비)

사업의 필요성 및 효과

❍ 도시미관을 저해하고 있는 노후․미관저해 간판을 정비하여 도시경관 개선

사업진행 개요

❍ 2012. 4월 : 사업 홍보 및 대상 신청접수

❍ 2012. 6월 : 노후․미관저해 간판 교체사업 지원대상 최종선정(61개소)

❍ 2012.12월 : 노후․미관저해 간판 교체사업 지원 심의

(광고물 디자인 시안 및 제작비 적적등 검토)

❍ 2012.12월 : 노후․미관저해 간판 교체 완료

사업성과

❍ 노후간판 교체로 아름답고 쾌적한 도시미관 조성에 기여

관련사진
사업 전			사업 후

도로조명 제어관리시스템 설치

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 수영로, 황령대로, 우암로, 석포로, 용호로, 전포대로, 신선로 ❍ 규 모 : 도로조명 제어관리시스템 구축(76대) 1식 ❍ 사업내용 : 배전함 교체 43면, 배전함 교체 33대,관제시스템 설치 1식 ❍ 사업기간 : 2012.04.18 ~ 2012.05.02 ❍ 총사업비 : 250백만원(시비)

사업의 필요성 및 효과

❍ 도로조명시설(가로등) 원격 관리시스템을 구축하여 실시간 원격 감시․제어함으로써 체계적이고 효율적인 시설물 관리 필요

사업진행 개요

❍  2012. 1월 : 사업예산확보(시비)

❍  2012. 2월 : 사업발주 및 시행

❍  2012. 5월 : 설치완료

사업성과

❍ 도로조명 제어관리시스템 도입으로 가로등 등의 점․소등을 일괄 제어

❍ 에너지 절감 및 안전사고 예방을 통한 주민만족도 증진

관련사진
사업 전			사업 후

성모병원 ~ 해군공관 간 도로개설

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 용호동 성모병원 ~ 해군공관 일원 ❍ 규 모 : 도로확장 L=540m, B=6~8m→12m ❍ 사업기간 : 2011. 1월 ~ 2014. 12월 ❍ 사 업 비 :2,490백만원(국비1,000 시비800 구비690)

사업의 필요성 및 효과

❍  이기대공원 접근 및 통과도로 기능향상으로 공원 이용자 편의 제공

❍  상습정체구간인 용호로 교통량 분산으로 교통체증 완화

사업진행 현황

❍  2011.  3월 : 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시

❍  2011.  4월 : 특별교부세 3억원 확보

❍  2011.  8월 : 국․공유지 무상귀속 협의, 협의보상추진

❍  2012.  6월 : 토지수용개시, 사유지 보상완료

❍  2012. 11월 : 2012년도 특별교부세 7억확보

❍  2012. 12월 : 국방부 부지 보상추진(보상비 3억)

❍  2013.  6월 : 공사착수(L=220m, B=6~8→12m)

❍  2013.  7월 : 국유지 보상

향후 추진계획

❍  2013. 12월 : 1구간 공사 완료 예정(L=220m, B=6~8→12m)

❍  2014. 12월 : 2구간 공사 완료 예정(L=320m, B=6~8→12m)

관련사진
[위 치 도]
[현 장 사 진]

이기대~백운포간 친수연안조성

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 용호동 이기대 도시자연공원 일원 ❍ 사업내용 : 동생말휴게소 입구 정비, 어울마당 일원 정비 산책로 정비, 오륙도선착장 일원 사면정비 ❍ 사업기간 : 2007년 ~ 2013년 ❍ 사 업 비 : 3,080백만원(국비1,620 시비1,460)

사업의 필요성 및 효과

❍ 자연경관이 수려한 해안으로 일반 시민들의 접근성 제고

❍ 연안침식방지 및 친환경적인 친수연안 조성

사업진행 현황

❍ 2007.11월 : 연안정비사업 실시계획 승인(국토부)

❍ 2008. 1월 : 도시계획시설(공원) 실시계획인가(시)

❍ 2011. 9월 : 1차 연안정비 사업 완료(해안산책로 조성 L=3,950m)

❍ 2013. 1월 : 2차 연안정비 사업 예산 교부(市항만물류과)

❍ 2013. 2월 : 실시설계용역{(주)삼영기술}

❍ 2013. 6월 : 계약심사 및 공사계약의뢰

❍ 2013. 7월 : 공사착공

향후 추진계획

❍ 2013. 12월 : 공사 완료 예정

관련사진
[위 치 도]
[현 장 사 진]

문현4동 주민복합센터 신축공사

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 문현4동 1012-3번지 등 9필지 ❍ 부지면적 : 329㎡ ❍ 건축면적 : 159.53㎡, 연면적 : 409.13㎡ ❍ 층수 및 구조 : 지상3층, 철근콘크리트조 ❍ 사업내용 : 기존 노후 건축물 철거 후 주민공동이용시설 신축 ❍ 소요예산 : 860백만원(시비) ❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2013년

사업의 필요성 및 효과

❍ 장고개로 일원에 위치한 노후 문현4동 새마을회관, 어린이 놀이터를

철거 후 주민공동이용시설 신축하여 주민복지 향상

사업진행 현황

❍ 2012. 02.  : 사업 신청

❍ 2012. 03.  : 1차 사업비 확보(시비 400백만원)

❍ 2012. 07.  : 토지매입(국유지 2필지, 사유지 1필지)

❍ 2013. 04.  : 추가 사업비 확보(시비 460백만원)

❍ 2013. 05.  : 실시설계용역 시행

향후 추진계획

❍ 2013. 08.  : 착공

❍ 2013. 12.  : 준공

관련사진
[조 감 도]
[위 치 도]

오륙도 해파랑길 관광안내소 건립

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 용호동 산197-4번지(승두말 입구) ❍ 규 모 : 안내소 339.43㎡(지상2층), A=2,453㎡ ❍ 사업내용 : 종합안내소, 휴게시설, 다목적실, 화장실, 주차장 등 ❍ 사업기간 : 2011. 5월 ~ 2012. 12월 ❍ 사 업 비 : 1,100백만원(국비550, 시비500, 구비50)

사업의 필요성 및 효과

❍ 문화체육관광부에서 추진하고 있는 해파랑길(동해안 탐방로) 조성계획에 의거 출발점이 오륙도 주변으로 결정됨에 따라 관광안내소 건립 필요

❍ 관광객에게 해파랑길과 부산시의 주요관광지 정보 및 휴식공간 제공

❍ 해파랑길의 출발점으로서 오륙도와 연계하여 관광자원 개발

사업진행 현황

❍ 2011. 5월  국․시비 보조금 10.5억원 교부(국비5.5, 시비5)

❍ 2011. 8월  기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2011.11월  국가지정 문화재 현상변경 허가(문화재청)

❍ 2012. 1월  착공

❍ 2012.12월 준공

❍ 2013. 2월 개소

관련사진
[위치도]
[ 전 경 ]