특 수 공 시

2014년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2013년도】                                                   (단위 : 억원)

구분	사 업 명	사 업 개 요	총 사 업 비	비고
계	총 20건		561.4
1	유엔참전 기념거리조성	UN참전국 및 평화상징 특화거리 조성(L= 5,040m)	50.0
2	6.25참전 UN활동기념조형물설치	A=297㎡(조형물 1식) (가로19.8m×세로19.1m×높이15.5m)	6.7
3	남구 CCTV 통합관제센터 구축	A=379.2㎡, 방범, 청소, 재난 등 체계적 통합관제	13.6
4	대연1동 주민센터 건립	A=858㎡(지상3층)	34.0
5	다목경로당 신축	A=49.9㎡(지상2층)	1.3
6	용문․용친 경로당 이전	A=131.47㎡(지상2층)	2.4
7	백운포체육공원 테니스장앞 공중화장실 개축	지상1층 32㎡, 경량철골조	0.8
8	기초생활보장 수급자재래식 화장실 개선사업	남구 관내 수급자 4개소의 재래식 화장실 수세식으로 개선	0.2
9	도시옥상텃밭 조성사업	12개소(용당어린이집외 11개소) 텃밭 면적(485㎡) 조성	0.7
10	문현동 생태숲 조성사업	A=28.101㎡, 토지매입, 묘지 이장 등 생태숲조성	45.0
11	스카이워크 설치	A=1,423.8㎡, 2011년 ~ 2013년	14.0
12	오륙도홍보관 설치	A=88.61㎡, 오륙도 역사안내 및 홍보	3.5
13	이기대공원 일원 주차장조성	A=4,495㎡, 90면내외	39.0
14	노후․미관저해 간판교체사업	․61개 간판교체 (가로간판 39, 돌출간판 22)	0.6
15	대연천 생태하천 복원사업	L=606m, B=7~17m	160.0
16	용호로 일원 침수피해개선 복구공사	펌프장(Q=420㎥/min) 및 우수저류시설설치	180.0
17	문현4동 주민복합센터 신축	A=417.77㎡(지상3층),노후 건축물 철거 주민이용시설신축	8.6
18	장애인정보누리터 설치	장애인보조공학기기 13종 19점설치	0.2
19	다문화코너(多색多감)조성	다국어 리플릿제작, 다문화잡지구입 등	0.8

유엔참전 기념거리 조성

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : UN기념공원 주변 가로 3개 구간 ❍ 규 모 : 유엔참전 기념거리 조성 5.04km(왕복) ❍ 사업내용 : UN참전국 및 평화상징 특화거리 조성(L= 5,040m) ▷ 보도정비, 보행 편익시설 ․ 스토리텔링 시설물 설치 ▷ LED 상징가로등 설치, 지하차도 벽면 디자인 개선 ▷ UN기념공원~평화공원 가림막 등 경관개선, 각종 공공시설물 정비 등 ❍ 사업기간 : 2013년 〜 2016년 ❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 3,325, 시비 1,425, 구비 250)

사업의 필요성 및 효과

❍ UN기념공원 주변 도시미관 저해시설물(고철소 가림막, 노후보도 등) 정비로         가로 경관개선 및 국제적 위상 제고

❍ 역사적 명소인 UN기념공원과 연계한 역사·평화체험 효과 극대화

사업진행 현황

❍ 2013. 5월  국가보훈처 현충시설 건립지원사업 선정

❍ 2013. 7월  市 투 ․ 융자사업 심사

❍ 2014. 1월  설계 공모 당선작 선정

❍ 2014. 2월  기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2014. 3월  착수보고회

❍ 2014. 6월  중간보고회

❍ 2014. 8월  市 공공디자인 심의(자문)

향후 추진계획

❍ 2014. 10월  기본 및 실시설계용역 준공

❍ 2014. 11월  공사발주 및 착공(예정)

관련사진
[조 감 도]
[위 치 도]

6․25참전 UN군 활동기념 조형물 설치

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 대연동 707번지(평화공원 중앙광장) ❍ 규 모 : A=297㎡ (가로 19.8m×세로 19.1m×높이 15.5m) ❍ 사업내용 : 조형물 1식(주조형물, 참전국 공적비, UN군 활동기념비) ❍ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2014. 11. ❍ 사 업 비 : 674백만원 (분권교부세)

사업의 필요성 및 효과

❍ 세계평화와 자유수호를 위해 희생한 UN참전용사의 공훈을 기림

❍ UN기념공원과 연계한 역사․평화체험 기반조성

❍ UN평화문화특구의 상징적 랜드마크 조성

사업진행 현황

❍ 2012.11월 ‘13년 현충시설 건립지원 사업 선정 (국가보훈처)

❍ 2013. 7월   제안공모

❍ 2013. 8월   제안서 평가, 계약체결 ▹(주) 피앤

❍ 2013. 9월   사업착수

❍ 2013.10월  착수보고회 개최

❍ 2013.11월  공공조형물 심의▹市 미술작품심의위원회

❍ 2014. 1월  공원조성계획 결정(변경) 심의▹市 도시공원위원회

❍ 2014. 2월  평화근린공원 조성계획 결정(변경) 고시

❍ 2014. 4월  자문위원회 개최

❍ 2014. 7월  도시계획시설사업(평화공원) 실시계획 인가 ․ 공사시행

향후 추진계획

❍ 2014. 11월  준공(예정)

관련사진
[조 감 도]
[위 치 도]

남구 CCTV 통합관제센터 구축 사업

	【 사 업 개 요 】
❍ 사업기간 : 2013. 6월 ~ 10월 ❍ 사업내용 : 남구 CCTV 통합관제센터 구축 ❍ 사 업 비 : 1,362백만원【국비 633, 시비 544, 교육청 185)】

사업의 필요성 및 효과

❍ 관내 방범, 청소, 교통, 재난․재해, 어린이보호 등 공공용 CCTV의

지속적 증가에 따라 효율적이고 체계적인 관리 필요

❍ 범죄 사전 예방 및 신속한 대응을 통한 주민의 생명과 재산을 보호

하고 구민의 삶의 질 향상과 안전한 도시환경 조성

추진사업 현황

❍ 2012.  9월 : CCTV 통합관제센터 구축장소 확정(보건소 4층)

❍ 2012. 10월 : CCTV 통합관제센터 구축 대상지 선정(남구 등 4개구)

❍ 2013.  2월 : CCTV 통합관제센터 구축사업 설계용역

❍ 2013.  4월 : CCTV 통합관제센터 설계용역 최종보고회

CCTV 통합관제센터 구축사업 발주의뢰(부산조달청)

❍ 2013.  6월 : CCTV 통합관제센터 구축 사업자 선정

▷ 사업자 : 건아정보기술(주), 세정아이앤씨(공동수급)

❍ 2013.  8월 : CCTV 통합관제센터 착수보고회

❍ 2013. 10월 : CCTV 통합관제센터 구축사업 준공

❍ 2013. 12월 : 『남구 CCTV 통합관제센터』개소

남구 CCTV 통합관제센터 운영 협약체결(남구, 남부경찰서, 남부교육지원청)

❍ 2014.  1월 : 『남구 CCTV 통합관제센터』본격 운영

❍ 2014.  6월 : 향토방위태세 확립을 위한 유관기관과의 업무협약 체결

(부산광역시 남구 ⇔ 부산남부경찰서 ⇔ 제7508부대 2대대)

현 장 사 진

통합관제실	회의실
홍보관	정보통신실

대연1동 주민센터 건립

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 대연1동 984-20번지(舊 동해탕 옆) ❍ 규 모 : 부지 495㎡, 지상3층 / 연면적 858㎡ ❍ 사업내용 : 대연1동 주민센터 건립 ❍ 사업기간 : 2015. 2월 ~ 2015. 12월 ❍ 사 업 비 : 3,401백만원(전액 구비)

사업의 필요성 및 효과

❍ 現 동사의 노후화(1974건립) 및 안전성 문제 및 편의시설 미비 등으로 주민불편이 장기화 되고 있으며,

❍ 2013.7.1.자 대연1·2동 통합으로 인한 사무공간 및 주민자치센터 프로그램 운영 등 공간부족으로 청사 신축을 통한 대주민 행정서비스 제약 해소

❍ 동 주민숙원사업 해소로 區 행정에 대한 신뢰도 상승

사업진행 현황

❍ 2013.07.17 : 대연1동사 건립계획(방침) 수립

❍ 2013.08.06 : 부지매각(10년 연부취득) 방문협의(市회계재산담당관실)

❍ 2013.10.24 : 市 공유재산심의회 부지매각(연부) ⇒ 원안가결

❍ 2013.12.17 : 市의회 공유재산관리계획 심의 ⇒ 원안가결

❍ 2014.01.23 : 구정조정위원회 심의(부지매입 및 건립) ⇒ 원안가결

❍ 2014.03.04 : 區의회 공유재산관리계획 심의 ⇒ 원안가결

❍ 2014.03.28 : 市재정계획심의위원회 재정투·융자사업 심사 ⇒ 원안가결

향후 추진계획

□ 2014. 7월     제1회 추경 예산반영 요구(동사 부지 매입비)

□ 2014. 8월     동사부지 매매계약(부산광역시, 연부취득) 체결

□ 2014.10월     부지인수 및 이전등기

□ 2014. 9월~11월   대연1동 주민센터 건립 설계 용역

□ 2015. 2월~12월   대연1동 주민센터 건립 착공 및 준공

관련사진
[현 장 사 진]
[위 치 도]
대연1동 주민센터 대연1동 주민센터 (예정부지)

다목경로당 신축

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 진남로216번길 22-6(문현동) ❍ 규 모 : 대지 66㎡, 건축연면적 49.9㎡(1층 28.4㎡, 2층 21.5㎡) ❍ 사업내용 : 경로당 신축 ❍ 사업기간 : 2013.7월 ~ 2013.12월 ❍ 사 업 비 : 134백만원(구비)

사업의 필요성 및 효과

❍ 노인 인구의 증가에 따른 경로당 수요 급증

❍ 경로당 신축으로 지역 어르신들의 상호 교류 기회 및 깨끗하고 쾌적한 노인여가 문화생활 공간 제공

사업진행 현황

❍ 2010년     경로당 신설 건의 접수

❍ 2013. 7월  경로당 매입 예산 확보

❍ 2013. 7월  부동산 매매계약 체결

❍ 2013. 9월  경로당 신축에 따른 설계용역 실시

❍ 2013.10월  경로당 신축공사 착공

❍ 2013.12월 경로당 신축공사 준공

❍ 2014.2.14 경로당 개소식 개최

관련사진		조감도, 완료전경 등
[조 감 도]
[위 치 도]

용문·용친경로당 이전

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 동명로170번길 128(용호동) ❍ 규 모 : 대지 134.4㎡, 건축연면적 131.47㎡(1층 77.09㎡, 2층 54.38㎡) ❍ 사업내용 : 경로당 이전에 따른 개보수공사 시행 ❍ 사업기간 : 2013.4월 ~ 2013.12월 ❍ 사 업 비 : 241백만원(구비 190백만원, 시비 51백만원)

사업의 필요성 및 효과

❍ 기존 용문경로당과 용친경로당은 열악한 환경과 노후한 시설로 그동안 지역 어르신들이 쉴 수 있는 노인여가공간이 마땅히 없어 여러차례 이전 건의하였음

❍ 경로당 건물 매입 및 개보수공사 시행으로 지역 어르신들에게 깨끗하고 쾌적한 노인여가 문화생활 공간 제공

사업진행 현황

❍ 2013. 3월  경로당 이전 건의(구청장 복지현장 체험의 날 행사 시)

❍ 2013. 7월  경로당 이전 예산 확보

❍ 2013. 8월  부동산 매매계약 체결

❍ 2013.11월  경로당 개보수공사 착공

❍ 2013.12월  경로당 개보수공사 준공

❍ 2014. 1. 6  경로당 이전에 따른 오찬간담회 개최

관련사진		조감도, 완료전경 등
[조 감 도]
[위 치 도]

백운포체육공원 테니스장 앞 공중화장실 개축

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 용호동 895-3번지 일원 (백운포체육공원 내) ❍ 규 모 : 지상1층 32㎡, 경량철골조 ❍ 사업내용 : 수세식 화장실[대변기6(남2, 여 4), 소변기 3] ❍ 사업기간 : 2013. 3. 18. ~ 2013. 4. 10. ❍ 사 업 비 : 84,482천원(시비42,241천원, 구비42,241천원)

사업의 필요성 및 효과

❍ 백운포 체육공원은 최근 운동장  대관 등으로 이용주민이 증가됨에 따라 노후 공중화장실 개축 필요

❍ 백운포 체육공원 체육시설을 이용하는 주민들에게 쾌적하고 깨끗한 화장실을 제공함으로써 이용주민 불편해소 및 편의증진 도모

사업진행 현황

❍ 2013. 3. 20. 화장실 조달구매 요청

❍ 2013. 3. 27. 기존 노후 공중화장실 철거공사

❍ 2013. 4. 10. 화장실 설치 완료

설치현장

기초생활보장 수급자 재래식화장실 개선사업

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 신정번영로65번길 46-5(대연동)외 3개소 ❍ 사업내용 : 정화조 매설, 수세식변기 설치, 타일공사 및 내부도색 ❍ 사업기간 : 2013. 4. 8. ~ 2013. 4. 29. ❍ 사 업 비 : 20백만원(시비)

사업의 필요성 및 효과

□ 도시지역 저소득계층의 환경피해 사례 발굴․개선하여 생활환경의 질적향상과

삶의 질 개선

□ 기초생활보장 수급자의 재래식 화장실을 수세식으로 개선을 지원함으로써

생활환경 편의 도모

Ⅱ		추진경과

사업진행 현황

❍ 2013. 1. 24. 시비보조금 교부

❍ 2013. 3. 18. 개선사업 대상자 선정

❍ 2012. 4.  1. 공사 계약

❍ 2012. 4.  8. 공사 착공

❍ 2012. 4. 29. 공사 준공

관련사진
공사전			공사후

도시옥상텃밭 조성사업

	【 사 업 개 요 】
❍ 사업기간 : 2013. 1. ~ 12. ❍ 위 치 : 12개소(용당어린이집 외 11개소) ▷ 어린이집(5), 유치원(2), 복지관(1), 공동주택(2), 주민센터(1), 학교(1) ❍ 규 모 : 시설면적(348.96㎡), 텃밭면적(485㎡) ❍ 사업내용 : 20가구 이상 집단화된 마을공동체, 공동주택, 학교, 유치원, 어린이집 등 도시옥상 텃밭 조성 ❍ 사 업 비 : 70,000천원(시 28,000 구 28,000 자 14,000)

사업의 필요성 및 효과

❍ 친환경 녹색 주거공간 조성으로 도시 품격 제고 및 구민 정서 함양 기여

❍ 친환경 농작물 재배로 안전하고 다양한 먹을거리 생산

❍ 도심온도 저감 등 산업화․도시화로 인한 환경문제 해소

사업진행 현황

❍ 2월 ~ 3월 : 수요조사 및 사업신청 접수

❍ 3월 ~ 4월 : 사업현장 조사심의, 사업대상자 및 시공업체 선정,

사업설명회 개최

❍ 4월 ~ 6월 : 사업자별 자재 공급 설치 완료

도시농업 주요 성과

❍ 2012~2013년 농축산시책 평가 부산시 우수기관 선정

❍ 2013년도 도시옥상텃밭조성 부산시 우수공동체 수상

- 남구 지게골 복지관(지게골로 139번길)

❍ 남구 친환경 도시농업 활성화 및 지원에 관한 조례 제정(2013.12.12)

관련사진		완료전경
▽ 남구 지게골 복지관
▽ 용호1동 주민센터

문현동 생태숲 조성사업

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 문현동 산56-5번지 일원 ❍ 규 모 : A=28,101㎡ ❍ 사업내용 : 용역, 토지매입, 묘지이장, 생태숲조성 등 ❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년 ❍ 사 업 비 : 4,500백만원(국비1,000 시비3,000 구비500)

사업의 필요성 및 효과

❍ 문현동 생태숲 조성 대상지는 주거지 주변 야산에 과거로부터 공동묘지가 형성되어 있는 지역으로 이로 인하여 혐오감 조성 및 쓰레기 무단투기 등으로 주거환경이 열악한 실정임

❍ 침체된 지역을 개발하여 지역의 관광자원으로 조성함

사업진행 현황

❍ 2014. 6월 국․시․구비 1.6억원 교부(국비0.8, 시비0.4, 구비0.4)

❍ 2014. 9월  도시관리계획(황령산유원지) 조성계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 착수

향후 추진계획

❍ 2014. 9월  2015년 市 본예산 신청(25억 : 토지매입14, 묘지이장11)

❍ 2015. 3월  2016년 국토부 도시활력증진지역 개발사업 응모(국8.2, 시4.6, 구4.6)                  등 사업예산 18.4억 확보노력

관련사진
[조 감 도]
[위 치 도]

스카이워크 설치

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 용호동 950-2번지 일원(승두말) ❍ 규 모 : A=1,423.8㎡ ❍ 사업내용 : 스카이워크, 광장, 진입로, 조경 등 ❍ 사업기간 : 2011. 2월 ~ 2013. 9월 ❍ 사 업 비 : 1,400백만원(국비980, 시비420)

사업의 필요성 및 효과

❍ 오륙도 일원 관광명소 조성 및 관광객들에게 볼거리 제공

❍ 오륙도 및 주변 해양보호구역의 체계적 보전 및 관리

❍ 친수공간 조성으로 시민 휴식공간 제공 및 해양자원 관광화

사업진행 현황

❍ 2011.  2월 스카이워크 설치사업 추진계획 수립

❍ 2012.  1월 실시설계용역 착수

❍ 2012.  6월 문화재 현상변경 허가 승인(문화재청)

❍ 2012.  8월 도시계획시설사업 실시계획인가

❍ 2012.  9월 토목(구조물) 분야 착공

❍ 2013.  9월 도시계획시설사업(스카이워크) 준공

❍ 2013. 10월 문화재 현상변경 완료 및 준공식 개최

❍ 2013. 11월 국유지 무상귀속 및 지적공부 정리

관련사진		조감도, 완료전경 등
[조 감 도]
[위 치 도]

오륙도홍보관 설치

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 용호동 950-1번지(해파랑길 관광안내소) ❍ 규 모 : 오륙도홍보관 제작 설치(A=88.61㎡) ❍ 사업내용 : 오륙도의 역사, 텔레스코우프, 일월오봉도, 생명파노라마, 오륙도 전경모형(생명이야기), 바닥매입모형, 감성오디오, 전자생물도감 등 ❍ 사업기간 : 2013. 5월 ~ 2013. 10월 ❍ 사 업 비 : 350백만원(국비245, 시비105)

사업효과

❍ 오륙도 및 주변 해역의 해양보호구역 지정의 실효성 확보와 해양생태계 보전․관리를 위한 홍보

❍ 동해안 탐방로의 시발점인 해파랑길 관광안내소를 활용한 오륙도홍보 및 갈맷길과 연계한 관광객에게 볼거리 제공

추진사항

❍ 2013. 02. 25 : 오륙도 홍보관 전시물 제작․설치 계획 수립

❍ 2013. 03. 20 : 오륙도 홍보관 전시물 제작․설치 입찰공고

❍ 2013. 03. 26 : 제안서 평가위원 후보자 공개모집 공고

❍ 2013. 04. 03 : 입찰참가 신청서 접수

❍ 2013. 04. 10 : 제안서 접수 및 평가위원 추첨

❍ 2013. 04. 15 : 제안서 평가

❍ 2013. 04. 25 : 제안서 및 가격협상

❍ 2013. 05. 10 : 계약체결

❍ 2013. 05. 15 : 사업착수

❍ 2013. 05. 31 : 착수보고 및 자문회의 개최

❍ 2013. 06. 19 : 중간보고회(1차) 개최

❍ 2013. 07. 26 : 중간보고회(2차) 개최

❍ 2013. 09. 11 : 추진상황 보고회(3차) 개최

❍ 2013. 10. 18 : 사업 준공 및 준공식 개최

관련사진		조감도, 완료전경 등
[위 치 도]
[완료사진]

이기대공원 일원 주차장 조성

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 용호동 16-1번지 외 8필지 ❍ 규 모 : 4,495㎡, 주차면 90면 내외 ❍ 사업내용 : 이기대공원 일원 주차장 조성 ❍ 사업기간 : 2013년~2014년 ❍ 사 업 비 : 3,900백만원 (시비 1,000, 구비 2,900) - 지금까지 집행액 : - 백만원 - 향후 소요액 : 3,900백만원 ▹ 보상 2,900(구비), 공사비 1,000(시비)

사업의 필요성 및 효과

❍ 주차공간 부족으로 인한 주민불편 해소 및 변화된 관광여건을 반영한

공영주차장 건설추진으로 주민 및 관광객 편의 제공

사업진행 현황(30%)

❍ 2013. 5월 : 공영주차장 건설계획 수립

❍ 2013. 9월 : 남구일원 공영주차장 설치 및 타당성검토 및 도시계획시설

결정 용역 실시

❍ 2013년 12월 : 도시계획시설(주차장) 결정에 따른 공감 공고

❍ 2014년 6월 : 이기대 공영주차장 결정 도시계획시설(주차장) 결정

향후 추진계획(미완료시)

❍ 2014. 하반기 : 이기공원 공영주차장 실시설계 및 보상 추진

❍ 2014.~       : 공사 착공 및 준공

관련사진		조감도, 완료전경 등
[위 치 도]

노후․미관저해 간판 교체 사업

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 ▷남구 전포대로 50-1 외 40개 업소 ❍ 규 모 ▷61개 간판 교체(가로간판 39개, 돌출간판 22개) ❍ 사업내용 ▷노후․미관저해 간판 교체 ❍ 사업기간 ▷2013.6월~2013.12월 ❍ 총사업비 ▷61백만원

사업의 필요성 및 효과

❍ 도시미관을 저해하고 있는 노후․미관저해 간판을 선별․정비하여 도시

경관 조성 및 이미지를 개선하고 범시민적 광고문화를 정착하기 위함

사업추진방법

❍ 선정결과 통보 □ 제작업체 선정 □ 디자인시안 접수 □ 광고물관리심의소위원회 심의 □ 간판제작 승인 □ 간판제작 완료신고 □ 보조금 지급

사업진행 개요

❍  2013.02.18~04.30 : 사업 홍보 및 대상 신청접수

❍  2013.07월 : 노후․미관저해 간판 교체사업 지원 대상 최종선정(41개소)

❍  2013.08월 : 노후․미관저해 간판 교체사업 지원 심의

(광고물 디자인 시안 및 제작비 적정등 검토)

❍ 2013.12월 : 노후․미관저해 간판 교체 완료 및 보조금 지급

사업성과

❍ 노후간판 교체로 아름답고 쾌적한 도시미관 조성 기여

관련사진
[사 업 전]
[사 업 후]

대연천 생태하천 복원사업

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 대연3동 UN조각공원 ~ 대연고가교 ❍ 사업내용 : 생태하천 복원 L=606m, B=7~17m ❍ 총사업비 : 16,000백만원(공사비 95억, 보상비24억, 기타41억) ▷ 기투자 2,326백만원 향후투자 13,674백만원(국비 80억 시비80억) ❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2016년

추진사항 및 계획

❍ 2008. 01 : 하천기본계획 수립 ☞ 시 하천관리과

❍ 2011. 06 : 도심건천 복개하천정비 대상 선정 ☞ 환경부

❍ 2012. 05 : 실시설계용역 착수 ☞ 시 하천관리과

❍ 2013. 11 : 차도교 공사 예산 재배정 ☞ 시 하천관리과 → 남구

❍ 2014. 01 : 차도교 1개소 착공 ☞ 남구

▷ 공사명 : 대연천 차도교 재가설 공사(대천중학교 앞)

▷ 공사비 : 6억원

▷ 공사기간 : 2014. 1. 6 ~ 2014. 7. 5(공사중지 : 1. 8)

▷ 중지사유 : 하천정비사업 이전 소규모환경영향평가 승인 및  소하천정비 시행계획 수립 등 행정절차이행

❍ 2014. 03 : 소규모 환경영향평가 승인 ☞ 낙동강유역환경청

❍ 2014. 05 : 소하천정비 시행계획 수립 및 공고 ☞ 남구

❍ 2014. 06 : 정비구간내 편입물건 손실보상계획 공고 ☞ 남구

▷ 보상물건 : 10필지, 10,238㎡

향후 추진계획(미완료시)

❍ 2014. 07 : 감정평가 시행 및 손실보상 협의

❍ 2014. 08 : 대천중학교 앞 차도교 재가설 공사 재개

❍ 2014. 12 : 대천중학교 앞 차도교 공사 준공

❍ 2015. 12 : 대천중 ~ 신선로 간(L=250m) 정비 완료

❍ 2016. 12 : 신선로 ~ UN조각공원 간(L=356m) 정비 및 사업 준공

관련사진
[조 감 도]
복원사업 전 후 사진 복원 전 복원 후
[위 치 도]
생태하천복원 L=606m B=7~17m

용호로 일원 침수피해 개선복구공사

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 용호동 용호로 일원 ❍ 공사개요 : 펌프장 설치 및 우수저류시설 1식 및 배수관로 신설 L=1.19㎞ ❍ 총사업비 : 180억원(공사비 145, 보상 28 기타 7) ▷ 재원별 : 국비 93(51.6%), 시비 86(47.7%), 구비 1(0.7%) ❍ 사업기간 : 2012 ~ 2015 ❍ 기 투 자 : 2013년까지 80억원(공사 76, 기타 4) ▷ 사업내용 : 펌프장(Ｑ=420㎥/min) 및 우수저류시설 설치(V=3,800㎥) 1식 ❍ 향후투자 : 2015년까지 100억원(공사 69, 보상 28 기타 3) ▷ 사업내용 : 우수저류시설 설치(V=5,000㎥) 2개소,배수펌프장 1식 등

사업의 필요성

❍ 용호로(L=1.8㎞) 및 시가지(유역면적 238ha) 침수피해 개선

❍ 항구적인 침수피해 개선을 위해서는 기시행한 용호복지관 주변 펌프장

설치공사와 병행하여 추가사업 조속 시행 필요

추진사항 및 계획

❍‘11.07.27 : 집중호우로 인한 피해발생(일강우량 269.5㎜ 최대시우량 68.55㎜)

❍‘11.8.26 : 호우피해 복구계획확정통보(소방방재청 → 부산시 → 남구청)

❍‘12.03.~‘13.1 : 1차공사 시행(용호종합사회복지관 일원)

❍‘13. 09. 11 : 용호중학교 인근 우수저류시설 도시계획시설결정

❍‘13. 10. 07 : 공사착공(용호중학교 인근 우수저류시설 V=3,000㎥)

❍‘13. 12. 05 : 소방방재청 사전설계심의 완료

❍‘14. 02. 26 : 삼성시장, 백세교 일원 저류시설 도시계획시설 결정

❍‘14. 03 ~ : 삼성시장일원 배수펌프장 설치 대상지 보상추진

❍‘14. 09 : 용호중 인근 우수저류시설 설치완료, 삼성시장 배수펌프장 공사재개

❍‘15. 01 : 백세교 일원 우수저류시설 공사 착공

❍‘15. 12 : 용호지구 침수피해개선사업 완료

위치도 및 현황도

문현4동 주민복합센터 신축

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 문현4동 1012-3번지 등 2필지 ❍ 건축면적 : 164.73㎡, 연면적 : 417.77㎡ ❍ 층수 및 구조 : 지상3층, 철근콘크리트조 ❍ 사업내용 : 기존 노후 건축물 철거 후 주민공동이용시설 신축 ❍ 소요예산 : 860백만원(400백만원 2012년 기확보) ❍ 공사기간 : 2013.10.8.~2014.4.20

사업의 필요성 및 효과

❍ 장고개로 일원에 위치한 노후 문현4동 새마을회관, 어린이 놀이터를

철거 후 주민공동이용시설 신축하여 주민복지 향상

사업진행 경과

❍ 2012. 02.  : 사업 신청

❍ 2012. 03.  : 1차 사업비 배정(시비 400백만원)

❍ 2012. 07.  : 토지매입(국유지 2필지, 사유지 1필지)  ▷ 약 80백만원

❍ 2013. 04.  : 추가 사업비(시비 460백만원) 배정

❍ 2013. 05.  : 실시설계용역 시행

❍ 2013. 04.  : 추가 사업비(시비 4.6억원) 배정

❍ 2013. 5월 ~ 8월 : 실시설계용역 시행

❍ 2013. 09.  : 공사 시행건의 [시공사 : (주)황토종합건설]

❍ 2014. 04. : 준공

관련사진
[완료전경]
[위 치 도]

장애인정보누리터 설치

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구도서관 연속간행물실, 종합자료실 ❍ 사업내용 : 장애인 보조공학기기 13종 19점 설치 ❍ 사업기간 : 2013. 7월 ~ 2013. 11월 ❍ 사 업 비 : 20백만원(국비10, 시비10)

사업의 필요성 및 효과

❍ 공공도서관의 장애인을 위한 공간 및 시설확보를 통해 장애인들의 정보

접근력 강화 및 독서편의시설 제고

❍ 장애인보조기기 구입 및 프로그램 설치 등을 통한 공공도서관의 장애인의 서비스 제공 환경을 구축

사업진행 현황

❍ 2013. 7월           국․시비 보조금 20백만원 교부(국비10, 시비10)

❍ 2013. 10월~11월   장애인정보누리터 설치 및 장애인보조기기 등 구입                          및 설치완료

❍ 2013. 12월         장애인정보누리터 운영

관련사진
[1층 장애인 정보 누리터] 〔3층 종합자료실〕

다문화코너[多색多감] 조성

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구도서관 종합자료실 ❍ 규 모 : 코너 90㎡ ❍ 사업내용 : 다문화자료 코너 설치, 다국어 리플릿 제작, 다문화 잡지구입 등 ❍ 사업기간 : 2013. 7월 ~ 2013. 12월 ❍ 사 업 비 □다문화 자료 코너 : 69백만원(국비48, 시비21) □다문화 프로그램 지원 : 10.5백만원(국비 7.3, 시비3.2 )

사업의 필요성 및 효과

❍ 다문화 가족 및 외국인 근로자에게 다문화 자료 및 정보서비스 제공

❍ 선주민과 이주민 모두 다양한 나라의 언어와 문화를 접할 수 있는 공간 확보로 지역 주민간 소통과 화합의 장 마련

❍ 다문화지역민(아시아공동체학교)에 대한 독서지원을 통해 다문화코너 홍보 및 한국사회 정착에 도움을 주고자 함

사업진행 현황

❍ 2013. 7월        국․시비 보조금 79.5백만원 교부(국비55.3, 시비24.2)

다문화자료 코너 설계 용역

❍ 2013. 8월        다문화자료 코너 설치공사 및 집기․도서 구입

다국어리플릿 제작 번역, 인쇄

❍ 2013. 9월~12월 다문화코너 및 다문화프로그램 운영

관련사진
[ 3층 종합자료실내 다문화코너] 〔다문화 프로그램 운영〕