2014년 결산기준

특 수 공 시

2015년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2014년도】                                                   (단위 : 억원)

구분	사 업 명	사 업 개 요	총 사 업 비	비고
계	총 17건		332
1	못골골목시장 고객편의시설 건립	A=630.21㎡ 주차타워 2동 70면, 배송센터, 휴게쉼터, 화장실 등	43
2	이기대공원 일원 주차장 조성	A=4,495㎡, 주차면 90면 내외	54
3	대동골문화센터 건립	A=1,146㎡ (지상3층)	32.7
4	6.25참전 UN군 활동기념 조형물 설치	조형물 1식(주조형물, 참전국 공적비, UN군 활동기념비)	6.7
5	문현 교통광장 및 도로확장	교통광장 A= 3,700㎡, 전포로 A= 83㎡	84
6	평화공원 앞 우회도로 건설	도로개설 L=238m, B=15m	64
7	주민과 소통하는 쌈지공원 확대조성	A=1,479㎡, 쌈지공원 8개소 조성	3.9
8	해파랑길 공중화장실 신축	A=30㎡(지상1층)	1.2
9	도시농업 활성화 지원사업	44개소(용호어린이집 외 43개소), 1,675㎡	1
10	대연1동사 주민센터 건립공사	A=1,135.82㎡ (지상5층)	41
11	노트북 열람실 운영 및 멀티미디어관 시설 개선	노트북 전용 열람실 신설, 멀티미디어관 노후 PC 교체	0.4
12	공감과 소통의 ‘다문화 도서관’ 활성화	다문화자료 코너, 다문화 도서구입, 다문화프로그램 운영 등	0.1

1. 못골골목시장 고객편의시설 건립사업

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 대연동 1419번지 일원(못골골목시장 내) ❍ 면 적 : 부지면적 854㎡, 건축면적 540.86㎡(연면적 630.21㎡) ❍ 사업기간 : 2011년 ～ 2014년 ❍ 총사업비 : 4,380백만원(부지매입 2,375 / 건축비 2,005) ▹국비2,628, 시비1,314, 구비438 ❍ 사업내용 : 주차타워 2동 70면, 배송센터, 휴게쉼터, 화장실 등

추진상황

❍ 2011. 3. 3.  부지매입비 교부 ▷ 2,580백만원(국 1548, 시 774, 구 258)

❍ 2012. 1. 3.  건축비 교부 ▷ 600백만원(국 360, 시 180, 구 60)

❍ 2012.12.31.  부지보상협의개시(~2013.5.31) ▷ 미협의 - 필 50㎡ 61백만원

❍ 2013. 5.15.  건축설계 완료

❍ 2013. 6.15.  도시계획시설사업시행 고시(~2013.7. 2)

❍ 2013. 9.26.  지방토지수용심의위원회 개최 ▷ 토지수용일 결정(11. 4)

❍ 2013.11. 2.  지방토지수용심의위원회 재결금액 공탁, 등기이전(미협의 부지)

❍ 2013.11. 5.  건축허가 승인

❍ 2013.11.29.  건축공사 착공

❍ 2014. 1. 3.  2014년도분 사업비 교부 ▷ 1,200백만원(국 720, 시 360, 구 120)

❍ 2014. 1.17.~1.23.  소방, 전기, 통신, 조경공사 계약체결 및 착공

❍ 2014. 9.26.   건축공사 준공

❍ 2014. 9.29.   소방공사 준공

❍ 2014.10.17.   조경공사 준공

❍ 2014.10.20.   통신, 전기공사 준공

기대효과

❍ 주차장(고객편의시설)을 건립함으로써 시장 이용객들의 부족한 주차시설을 확보하고

전통시장의 경쟁력 강화

❍ 고객편의시설 건립으로 쾌적한 전통시장 환경 조성 및 소비자의 편리성과 접근성이 용이한 쇼핑 공간 확보로 전통시장 활성화 기여

관련사진

2. 이기대공원 일원 주차장 조성

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 용호동 16-1번지 외 8필지 ❍ 규 모 : 4,495㎡, 주차면 90면 내외 ❍ 사업내용 : 이기대공원 일원 주차장 조성 ❍ 사업기간 : 2013년~2015년 ❍ 사 업 비 : 5,438백만원 (시비 1,400, 구비 4,038) - 2014년도 집행액 : 38백만원 - 향후 소요액 : 5,400백만원 ▹ 보상 4,000(구비), 공사비 1,400(시비)

사업의 필요성 및 효과

❍ 주차공간 부족으로 인한 주민불편 해소 및 변화된 관광여건을 반영한

공영주차장 건설추진으로 주민 및 관광객 편의 제공

사업진행 현황(70%)

❍ 2013. 5월 : 공영주차장 건설계획 수립

❍ 2013. 9월 : 남구일원 공영주차장 설치 및 타당성검토 및 도시계획시설

결정 용역 실시

❍ 2013. 12월 : 도시계획시설(주차장) 결정에 따른 공감 공고

❍ 2014.  6월 : 이기대 공영주차장 결정 도시계획시설(주차장) 결정

❍ 2014. 11월 : 이기대 공영주차장 실시설계용역 완료

❍ 2015.  6월 : 토지 등 보상완료

❍ 2015.  7월 : 공사 진행중

향후 추진계획(미완료시)

❍ 2015. 하반기 : 공사준공 및 주차장 운영

관련사진
[위 치 도]

3. 대동골문화센터 건립

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 대연동 245-170번지 일원 ▷일명 대동골(낙농부락) ❍ 토지현황 : 6필지 1,146㎡(347평) ❍ 건축규모 : 1개동 지상3층, 면적 995.58㎡(301평), 철근콘크리트조 ❍ 주요시설 : 공연장(140석), 프로그램실, 전시장, 작품활동실, 휴게시설 등 ❍ 총사업비 : 3,273백만원 (국비 1,004 시비 753 市특별교부금 1,516) ❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2015년

사업의 필요성 및 효과

❍ 아파트 단지 건립 등으로 최근 대동골 거주 주민수 증가

※ 대동골 아파트 현황 :  8종 아파트 총 31개동 3,468세대 10,425여명 거주

❍ 급증한 인구에 비하여 문화기반시설 부족으로 절대적인 문화소외지역으로 급변

❍ 이에 남구 대연동 245-170번지 일원에 지역주민을 위한 문화센터를 건립하여 상대적으로 문화소외지역인 황령산터널 일원 지역민의 삶의 질 향상 및 복지 증진에 기여

사업진행 현황

❍ 2011. 11월 : 대동골문화센터 건립계획 수립

❍ 2013.  3월 : 도시관리계획(문화시설) 결정

❍ 2013. 10월 : 건축설계공모 당선작 선정 ▹(주)우헌건축사사무소

❍ 2013. 11월 : 기본 및 실시설계용역 착공

❍ 2014.  5월 : 도시계획시설(문화시설)사업 실시계획인가 고시

❍ 2014.  5월 : 기본 및 실시설계용역 준공

❍ 2014.  9월 : 공사 착공

❍ 2015.  5월 : 공사기간 연장(옹벽설치로 인한 공사지연)

□ 당초 : 2014.9.1.～2015.5.31.(9개월간)

□ 변경 : 2014.9.1.～2015.8.29.(12개월간)

❍ 2015.  6월 :  골조·내부조적·미장·방수공사 완료 ※ 현 공정율 70%

향후 추진계획

❍ 2015. 8. 29.  공사준공

❍ 2015. 10월    대동골문화센터 개소

관련사진
[조 감 도]
[위 치 도]

4. 6․25참전 UN군 활동기념 조형물 설치

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 대연동 707번지(평화공원 중앙광장) ❍ 규 모 : A=297㎡ (가로 19.8m×세로 19.1m×높이 15.5m) ❍ 사업내용 : 조형물 1식(주조형물, 참전국 공적비, UN군 활동기념비) ❍ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2014. 12. ❍ 사 업 비 : 674백만원 (분권교부세)

사업의 필요성 및 효과

❍ 세계평화와 자유수호를 위해 희생한 UN참전용사의 공훈을 기림

❍ UN기념공원과 연계한 역사․평화체험 기반조성

사업진행 현황

❍ 2012.11. 2013년 현충시설 건립지원 사업 선정 (국가보훈처)

❍ 2013.08. 제안공모 협상적격자 확정 ▷ (주) 피앤

❍ 2013.09. 사업착수

❍ 2014.02. 평화근린공원 조성계획 결정(변경) 고시(市고시 제2014-75호)

❍ 2014.07. 도시계획시설사업(평화공원) 실시계획 인가 ․ 공사시행

❍ 2014.12. 준공 및 제막식

향후 추진계획

❍ 2015~계속 : 유지관리

관련사진
[조 감 도]
[위 치 도]

5. 문현 교통광장 및 도로확장

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 문현동 721번지 일원(문현교차로 일원) ❍ 사업규모 : 교통광장 A= 3,700㎡, 전포로 A= 83㎡ ❍ 총사업비 : 8,400백만원 ▷ 재원별 : 시비 8,400백만원(재배정사업) ❍ 사업기간 : 2011 ~ 2014 이후 ❍ 기 투 자 : 2011년 1,800백만원[광장조성 1,161㎡, 도로(가각)정비 83㎡] 2012년 900백만원(광장조성 234㎡), 2014년 : 1,000백만원(광장조성 370㎡)

사업의 필요성 및 효과

❍ 장기미집행 도시계획시설 보상을 통해 주민재산권 보호

❍ 교통소통 원활 및 도시미관 개선

추진사항

❍ 1972. 12월 : 도시계획시설(교통광장) 결정

❍ 2010. 10월 : 2010~2014 중기재정계획 반영

❍ 2011. 11월 : 2011년도 제3차 투․융자사업 심사

❍ 2011. 12월 : 공사시행【광장조성 A=1,161㎡, 도로확장 A=83㎡】- 준공 ‘12. 5.

❍ 2012. 12월 : 특별교부세  9억원 확보.

❍ 2013.  2월 : 지장물건 조사보고【토지 A=234㎡, 건물 1동】

❍ 2013.  4월 : 감정평가

❍ 2013.  5월 ~ 11월 : 보상협의(이해관계인 4명 보상 7.9억원)

❍ 2013. 12월 : 수용재결 ← 영업권 행정소송 진행중

❍ 2014.  3월 : 특별교부금 10억원 확보

❍ 2014.  5월 : 실시계획 변경고시

❍ 2014. 11월 : 공사착공 (‘14.11.14 ~ ’15. 3.13)

❍ 2015.  1월 : 보상완료 (토지 A=369.6㎡, 건물 1동)

❍ 2015. 03. 13. : 공사 준공

추진계획

❍ 잔여구간 예산확보 사업 시행

관련사진

❍ 위치도

2011 이전투자
2012 투 자
2014 투 자
향후투자

❍ 현장사진(전. 후)

6. 평화공원 앞 우회도로 건설

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 대연동 1281-7번지 일원(평화공원 ~ 동명대 입구 간) ❍ 총사업비 : 6,400백만원 ▷ 재원별 : 시 도로계획담당관실 재배정 ❍ 사 업 량 : 도로개설 L=238m, B=15m ▷ 기시행 : -, 금회 : L=238, 금후 : - ❍ 사업기간 : 2012 ~ 2014

사업의 필요성 및 효과

❍ 북항대교~동명오거리간 고간 및 지하차도 개설에 따른 평화공원 일원의 교통체계 변경으로 인한 주민불편 해소

❍ 원활한 교통처리와 교통사고 예방

추진사항

❍ 2012. 12월 : 도시계획시설 결정

❍ 2013.  5월 : 실시계획 고시

❍ 2013.  7월 : 공사착공

❍ 2014.  7월 : 공사 준공

관련사진

❍ 위치도
❍ 현장사진

7. 주민과 소통하는 쌈지공원 확대조성

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 우암동 189-949번지 등 8개소 ❍ 규 모 : A=1,479㎡ ❍ 사업내용 : 쌈지공원 8개소 조성(먼나무 등 7종 6,679주 식재 등) ❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2015. 1. ❍ 사 업 비 : 387백만원

사업의 필요성 및 효과

❍ 주민과 소통·공유를 위한 쌈지공원 확대조성으로 건전한 여가활동 증진

❍ 생활형 쌈지공원 조성으로 노인 휴게공간 제공 및 지역 커뮤니티 활성화

❍ 주민 요구도가 높은 장소는 사유지라도 매입 후 추진하여 사업효과 극대화

사업진행 현황

❍ 2014. 4월   영남제분 앞 쌈지공원 등 3개소 조성

❍ 2014. 6월   부산예술회관 앞 쌈지공원 등 2개소 조성

❍ 2014. 8월   번영로 고가하부 쌈지공원 조성

❍ 2014.10월  못골골목시장 주차장 쌈지공원 조성, 우암동 노인쉼터 토지보상

❍ 2015. 1월  우암동 노인쉼터 조성

❍ 2015. 5월  산수쉼터 토지보상

❍ 2015. 6월  우영쉼터 조성 착공

향후 추진계획

❍ 2015. 8월  우영쉼터 조성 준공(예정)

❍ 2015.10월  산수쉼터 조성 준공(예정)

관련사진
[부산예술회관 앞 쌈지공원]
[우암동 노인쉼터]

8. 해파랑길 공중화장실 신축

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 용호동 950-1번지 해파랑길 관광안내소 앞) ❍ 규 모 : 지상1층 30㎡ 경량철골조 ❍ 사업내용 : 수세식화장실 [대변기 7(남 2, 여 5)], 소변기 3, 세면대 2 ❍ 사업기간 : 2014. 7. 4. ∼ 8. 8. ❍ 사 업 비 : 129백만원(국비 90백만원, 시기 39백만원)

사업의 필요성 및 효과

❍ “오륙도 스카이워크”개장으로 방문 관광객 증가

❍ 공중화장실 신축으로 방문객에게 쾌적하고 깨끗한 화장실 제공

사업진행

❍ 2014. 7. 6. 공중화장실 착공

❍ 2014. 7.16. 옹벽설치, 오수처리시설 설치 등

❍ 2014. 8. 8. 화장실 준공

현장사진

9. 도시농업 활성화 지원사업 추진

	【 사 업 개 요 】
❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 12. ❍ 사업대상 : 주택, 어린이집, 공공건물 등에 친환경 텃밭농원 조성을 하려는 자 ❍ 총사업비 : 100백만원 ❍ 사 업 량 : 옥상텃밭조성 44개소

사업내용

❍ 사업목적 : 건물의 자투리 공간을 활용한 옥상텃밭 조성으로 안전한 먹거리를

생산하고 구민정서 함양 및 도시농업 활성화 도모

❍ 사업시기 : 2014. 1. ~ 12.

❍ 사업대상 : 44개소(용호어린이집 외 43개소), 1,675㎡

❍ 사 업 비 : 100백만원(시비40 구비40 자부담20)

❍ 사업유형 : 데크, 상자 등 전면텃밭형 자율선택

추진실적

❍ 2014. 1월 ~ 2월 : 수요조사, 예산확보, 사업신청․접수

❍ 2014. 3월 : 대상자 선정, 텃밭상자 및 모종 등 공급

❍ 2014. 4월 ~ 11월 : 텃밭조성, 재배기술 교육, 운영평가 실시 등

▷ ‘14년도 도시옥상텃밭조성 부산광역시 최우수공동체 수상

☞ 용호어린이집(이기대공원로 7)

기대효과

❍ 녹색 친환경 주거공간 조성으로 도시 품격 제고 및 구민 정서함양에 기여

❍ 친환경 재배로 안전하고 다양한 먹거리 생산

❍ 도심온도 저감 등 산업화․도시화로 인한 환경문제 해소

❍ 여성·노인 소일거리 제공 등 도시민의 삶의 질 향상

관련사진
2014년 도시옥상텃밭 용호어린이집(이기대공원로 7)

10. 대연1동 주민센터 건립공사

	【 사 업 개 요 】
❍ 공 사 명 : 대연1동 주민센터 건립공사 ❍ 위 치 : 대연1동 984-20번지 ❍ 대지면적 : 공부상 495㎡, 실사용면적 478.41㎡(도로공제 16.59㎡) ❍ 건축규모 : 지상5층 / 연면적 1,135.82㎡, 철근콘크리트구조 ❍ 총사업비 : 4,123백만원(설계 및 공사비 2,503/업무추진비 0.8/부지매입비 1,619)

사업목적

❍ 현 주민센터의 노후화 및 안전성 문제, 편의시설 미비 등에 따른 주민불편장기화와 대연1·2동 통합으로 인한 사무공간 및 주민자치센터 프로그램 운영 등 공간부족에 따른 대주민 행정서비스 제약 해소를 위함

추진 현황

❍ 2013.  7월 : 대연1동 주민센터 건립계획 수립

❍ 2013. 10월 : 시 공유재산심의회 부지매각 심의(원안가결)

❍ 2014.  7월 : 제1회 추경예산 확보(부지매입비331백만원,설계용역비70백만원)

❍ 2014.  9월 : 2015년 본예산 확보(건립비640백만원)

❍ 2014. 11월 : 실시설계용역 시행

❍ 2014. 12월 : 특별교부세 확보(건립비500백만원)

❍ 2015. 1월~4월 : 주민설명회 개최, 건축전문가 자문, 건축위원회심의

❍ 2015. 5월~6월 : 건축협의승인(2015.05.20.), 계약심사, 설계용역 준공

❍ 2015. 7월 : 공사발주(입찰공고 등 행정절차 이행 중)

향후 추진계획

❍ 2015. 7월 말 : 건축감리 용역발주

❍ 2015. 8월 초 : 공사계약 및 공사착공(공사기간 : 착공일로부터 180일)

❍ 2016. 2월 초 : 공사준공

관련사진
[투 시 도]
[위 치 도]

11. 노트북 열람실 운영 및 멀티미디어관 시설 개선

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구도서관 노트북 열람실, 멀티미디어관 ❍ 사업내용 : 노트북 전용 열람실 신설, 멀티미디어관 노후 PC 교체 ❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월 ❍ 사 업 비 : 36백만원(구비)

사업의 필요성 및 효과

❍ 노트북 열람실 신설 및 멀티미디어관 노후 시설 개선을 통해 쾌적하고 편리한 환경제공

❍ 열람실내 소음야기 등 다양한 노트북 사용관련 민원 해결

❍ 디지털 시대에 맞는 이용자 중심의 서비스 제공

사업진행 현황

❍ 2014. 1월  기존 정보화교육장(3층/113㎡)을 노트북 전용 열람실로 운영

▷ 멀티미디어관 내 노트북 코너(7석) ⇒ 노트북 전용 열람실(20석) 이전 운영

▷ 노트북 전용 열람실 內 무료 WIFI ZONE 운영

❍ 2014. 3월  멀티미디어관 노후PC 교체

▷ 디지털환경변화로 노후화된 PC 교체(27대⇒32대) 증설 운영

관련사진
[노트북 열람실 운영] 〔멀티미디어관 내부〕

12. 공감과 소통의‘다문화 도서관’활성화

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구도서관 종합자료실 ❍ 규 모 : 코너 90㎡ ❍ 사업내용 : 다문화자료 코너, 다문화 도서구입, 다문화프로그램 운영 등 ❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월 ❍ 사 업 비 □다문화 프로그램 지원 : 11.4백만원(국비 8, 시비3.4 )

사업의 필요성 및 효과

❍ 다문화 주민을 위한 다양한 정보․자료․프로그램 제공을 통해 도서관 이용

활성화 유도 및 지식․정보 등 문화격차 해소

❍ 내국인에 대한 다문화 인식 개선 사업을 통한 상호 존중 및 사회갈등 해소

❍ 다문화가정, 외국인 근로자 및 유학생들의 정보문화공간 역할 수행

사업진행 현황

❍ 2014. 1월~12월   다문화코너 다색다감 운영

다문화 도서자료 확충 : 도서 1,312권, 잡지 66권

❍ 2014. 1월, 12월   다문화 인식개선 프로그램 운영

❍ 2014. 5월         다문화 코너 안내 리플릿 제작 및 관내 6개 대학 등 배부

❍ 2014. 9월         해외번역 출판된 한국도서 및 외국도서 30권 전시

❍ 2014. 9월~12월   다문화코너 및 다문화프로그램 운영

관련사진
[ 3층 종합자료실내 다문화도서전시] 〔다문화 프로그램 운영〕