2017년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2016년도】                                                 (단위 : 백만원)

구분	사 업 명	총 사 업 비	해당부서
계	총 15건	30,652
1	남구 실내빙상장 건립	11,000	기획감사실
2	제20회 오륙도 평화축제	243	문화체육과
3	문현3동 송정(남,여)경로당 신축(이전)	258	주민복지과
4	대연4동 문화경로당 신축(이전)	252	주민복지과
5	슬레이트 처리지원사업 추진	512	환경위생과
6	2016년 공중화장실 개선사업	87	청소행정과
7	전통시장 현대화사업 추진	1,480	경제진흥과
8	황령대로 도시숲 조성 공사	199	공원녹지과
9	2016년 평화공원 국화전시회	95	공원녹지과
10	유엔평화문화거리 보행환경개선사업	2,000	교통행정과
11	용호3동 이면도로 교통체계개선	147	교통행정과
12	문현1동 6통주변 도로개설	1,400	건설과
13	부산항 연계수송 도로개설(감만지구)	12,500	건설과
14	남구 스마트도서관 구축	140	도서관
15	백운포체육공원 테니스장 이전 조성	339	시설관리 사업소

남구 실내빙상장 건립

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 백운포로 108(용호동) 백운포체육공원 부지 ❍ 규 모 : 연면적 4,222㎡(지상2층) ※ 생활체육형 실내 빙상장 ❍ 사업내용 : 빙상장1면(61m×30m), 락카룸, 기계실, 휴게실 등 ❍ 사업기간 : 2015년 ～ 2018년 ❍ 총사업비 : 11,000백만원

추진상황

❍ 2015.12.  실내 빙상장 건립 지원사업 공모 선정

❍ 2016. 3.  설계용역발주계획 심의, 지방재정투자 사전심사

❍ 2016. 6.  실내빙상장 건립 설계공모 작품심사 및 발표

❍ 2016. 8.  기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2017. 3.  지방재정투자 2차심사(행정자치부)

❍ 2017. 4.  기본 및 실시설계용역 준공 및 공사 발주

❍ 2017. 5.  건립공사 낙찰자 결정 및 계약체결(1차수 계약)

▷ 단년도 차수계약(총 금액으로 입찰하고 시기별로 차수계약)

향후계획

❍ 2017. 9.  1차수 계약분 준공 및 2차수 계약체결

❍ 2018. 4.  공사준공 및 개관(3월 실준공, 4월 시운전)

기대효과

❍ 백운포체육광원과 국민체육센터를 연계한 종합 스포츠타운 구축

❍ 다양한 생활체육 경험기회 제공을 통한 주민 스포츠 복지향상

❍ 교육도시 남구의 도시브랜드 향상 및 동계스포츠 꿈나무 발굴 기여

관련사진
[위 치 도]
[현장사진]

제20회 오륙도 평화축제

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 평화공원 일원(부산광역시 남구 대연동 677번지) ❍ 프로그램 : 무대․체험․투어행사 등 34개 프로그램 ❍ 총사업비 : 243백만원(구비 200 / 시비 15 / 문화원 28) ❍ 사업기간 : 2016. 10. 21. ~ 2016. 10. 23.(3일간) ❍ 주최주관 : 부산광역시남구, 부산남구문화원

사업의 필요성 및 효과

❍ 평화공원을 중심으로 문화예술 도시 이미지를 대외적으로 널리 알리고 지역주민이 참여하는 부산을 대표하는 축제로 개발

❍ 남구 관광객을 대상으로 적극적인 홍보 및 체험형의 다양한 프로그램으로 구민의 문화예술 향유기회 확대 및 지역경제 활성화 도모

사업진행 현황

구 분	프 로 그 램
무대행사 (11)	□평화의 울림(개막식, 평화음악회) □자유의 염원(자유수호의 외침, 불꽃을 향한 염원) □화합 한마당(남구!나도 스타, 지구촌 한가족 공연, 화합의 소리) □전통성년례, 주민자치동아리경연대회, 평생학습동아리공연, □남구문화예술마당, 남구생활문화동아리공연, 대학생동아리공연 □시낭송회, 버스킹/퍼포먼스 공연
체험행사 (9)	□조각상 마임 퍼포먼스, 릴레이 기부 퍼포먼스(달려라! 피아노) □세계문화박람회 □체험부스(6개) - 페이퍼토이 만들기, 펄러비즈로 만드는 세계국기, 국화압화 - 평화컬러링북 색칠하기, 즉석사진인화, 국화차시음
투어행사 (2)	□평화스탬프투어, 해설사와 함께하는 평화스토리투어
전시행사 (6)	□국화전시회, 시화전, 참전용사 스토리전(평화공원, 부경대학교) □남구의 어제와 오늘 사진전, 어린이 평화도서전
부대행사 (6)	□오륙도사랑 걷기대회, 평생학습박람회, 주민자치박람회 □복지박람회, 남구 백일장, 아더마켓

향후 추진계획

❍ 킬러콘텐츠 발굴, 전문가 자문 등으로 부산 대표축제로의 발전방안 모색

관련사진
[ 행사사진 ]
[ 행사사진 ]

문현3동 송정(남.여)경로당 신축(이전)

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 문현로66번길 136-1(문현동) ❍ 규 모 : 대지 101㎡, 건물 지상2층 90㎡ ▷ 1층 45.36㎡, 2층 44.64㎡ ❍ 사업내용 : 경로당 신축 ❍ 사업기간 : 2016.1. ~ 2016.10. ❍ 사 업 비 : 258백만원(시비200, 구비58)

사업의 필요성 및 효과

❍  1984년경 건축된 송정(남·여)경로당 건물은 노후 불량 건축물로

우리 구 도시계획사업으로 화장실 등 부분철거가 예정되어 안전상 문제가 제기되어 현재 위치의 기존 노후 경로당 철거 후 신축

❍ 지역 어르신들에게 안전하고 쾌적한 노인여가 문화생활 공간 제공

사업진행 현황

❍ 2015. 1월   경로당 이전 건의

❍ 2016. 1월   기존 송정(남,여)경로당 철거

❍ 2016. 4월   부지매입(국.시유지)

❍ 2016. 5월    공사착공

❍ 2016. 8월    공사준공

❍ 2016.10월   경로당 개소식 개최

관련사진
[현장사진]
[내부사진]

대연4동 문화경로당 신축(신설)

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구 유엔평화로76번길 84(대연동) ❍ 규 모 : 대지 111㎡, 건물 지상1층 62.52㎡ ❍ 사업내용 : 경로당 신축 ❍ 사업기간 : 2016.1. ~ 2016.12. ❍ 사 업 비 : 252백만원(시비)

사업의 필요성 및 효과

❍ 대연4동 19,20통 일원은 많은 어르신들이 거주하고 있으나 적당한 휴식공간부족으로 노상에서 여가를 보내는 등 많은 불편을 야기하고 있어, 인근에 적정 부지를 매입하여 경로당 신축

❍ 지역 어르신들에게 깨끗하고 쾌적한 노인여가 문화생활 공간 제공

사업진행 현황

❍ 2015. 1월   경로당 신설 건의

❍ 2016. 7월   부지매입

❍ 2016.10월   공사착공

❍ 2016.12월    공사준공

❍ 2017. 2월   경로당 개소식 개최

관련사진
[현장사진]
[내부사진]

슬레이트 처리지원사업 추진

	【 사 업 개 요 】
❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2021년 (환경부, 10년 계속사업) ❍ 사업대상 : (무허가 제외) 주택용 슬레이트 지붕 건축물 ❍ 사 업 비 : 철거・처리(국비 50% : 시비 50%), 지붕개량(시비 100%) ❍ 추진방법 : 한국환경공단 위탁 시행

사업 목적

❍ 석면건축자재인 슬레이트의 경우, 대부분 노후되어 비산됨에 따라 구민건강 위협

❍ 슬레이트 처리지원사업 추진으로 구민건강 보호 및 도시환경 개선

2016년도 추진사항

❍ 사업대상 : (무허가 제외) 주택용 슬레이트 지붕 건축물

❍ 사업기간 : 2016. 2월 ~  12월

❍ 사 업 비 : 512백만원 (국비 238.5, 시비 238.5, 시보전기금 35)

┍ 슬레이트 철거・처리 : 가구당 336만원 ⇒ 국비 50% : 시비 50%

┕ 경제적 취약계층 지붕개량 : 가구당 350만원 ⇒ 시비 100%

❍ 추진실적                                                      (단위 : 가구)

세 부 사 업 명	사업물량	신청	포기	처리완료	추진율(%)
슬레이트 철거처리사업	142	246	95	151	106.3
취약계층 지붕개량사업 (철거와 병행실시)	10	18	7	11	110

❍ 추진방법 : 한국환경공단 위탁 시행

추진계획

❍ (매년 초) 슬레이트 처리지원사업 추진계획 수립

❍ (연중 계속) 지원여부 확인 및 사업신청 수시접수, 사업홍보 등

❍ (다음해 1~2월 중) 사업정산 및 결과보고

관련사진
[슬레이트 해체 전]
[슬레이트 해체 작업중]
[슬레이트 해체 후]

2016년 공중화장실 개선사업

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 - 부산 남구 대연동 산54-34(황령산 바람고개) - 부산 남구 용호동 산157-2(용호2동 체육공원, 견성암 뒤편) ❍ 사업내용 : 노후 재래식 공중화장실 2개소 교체 - 교체 시설유형 : 포세식화장실, 규모 15.6㎡ - 대변기 3 (남 : 1 / 여 : 2), 소변기 1 ❍ 총사업비 : 87,134천원 (시 · 구비 각 50%) ❍ 사업기간 : 2016. 2. 22. ~ 3. 18.

사업의 필요성 및 효과

❍ 노후 공동화장실 시설 개선으로 이용주민 불편사항 해소와 주거 복지향상 및 쾌적한 화장실문화 조성

사업진행 현황

❍ 2016. 2. 1. ~ 2.17. : 주민의견 수렴 (사전 입간판 설치 등)

❍ 2016. 2.12. ~ 2.19. : 토지 소유자와 사전 협의 (삼성문화재단 외 1명)

❍ 2016. 2.22. : 공사착공

❍ 2016. 3.18. : 공사준공

공사비 집행내역

1. 총사업비 : 87,134,090원

❍ 공중화장실 개선사업비 : 83,657,390원 (시ㆍ구비 각 50%)

❍ 공중화장실 시설유지비 :  3,476,700원 (기존 화장실 철거 공사비)

2. 공중화장실 개선사업비 집행내역(시ㆍ구비 각 50%)

(단위 : 원)

구 분	예산현액	집 행 액	잔 액	비 고
계	85,000,000	83,657,390	1,342,610
화장실 구입		68,933,390		조달구입
전기 인입공사		14,240,000
전기 개설비		484,000

☞ 집행 잔액은 화장실 시설유지비용으로 사용 (물탱크 구입 등)

관련사진
[현장사진 : 황령산 바람고개]
[현장사진 : 용호2동 체육공원]
공연장

전통시장 현대화사업 추진

	【 사 업 개 요 】
❍ 대 상 : 용호골목시장, 용호시장, 대연시장 ❍ 사업내용 ▹용호골목시장 : 아케이드 2구간사업(L=160m, B=6~8m) ▹용 호 시 장 : 주차장 방수 및 옥상 도색 ▹대 연 시 장 : 소방시설 개보수 및 외부 천막 교체 ❍ 총사업비 : 1,480백만원 (국비 888 / 시비 371 / 구비 145 / 자부담 76) ❍ 사업기간 : 2016. 2월 ~ 2017. 5월

사업의 필요성 및 효과

❍ 시설현대화 사업을 통한 전통시장 경쟁력 강화

❍ 노후 시설물 개선으로 전통시장 이용 주민 편의 도모 및 상가매출 증대

사업진행 현황

❍ 2016.  3월 : 사업비 확보(국·시비)

❍ 2016.  5월 : 대연시장 소방시설 개보수 및 외부 천막교체공사 착공

❍ 2016.  6월 : 대연시장 소방시설 개보수 및 외부 천막교체공사 준공

❍ 2016.  8월 : 용호시장 주차장 방수 및 옥상도색공사 착공

❍ 2016. 10월 : 용호시장 주차장 방수 및 옥상도색공사 준공

❍ 2016. 10월 : 용호골목시장 아케이드 2구간사업 착공

❍ 2017.  5월 : 용호골목시장 아케이드 2구간사업 준공

향후 추진계획

❍ 관내 전통시장 중 시설이 노후한 시장 대상으로 시설현대화 사업 지속 추진

❍ 상인 의식수준 개선 및 시장경영기법 전수를 위한 경영현대화사업 병행 추진

관련사진
[현장사진]
[현장사진]

황령대로 도시숲 조성 공사

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 대연동 황령(터널)대로 입구 중앙 교통안전지대 ❍ 사업내용 : 중앙분리화단 조성(A=940㎡) - 녹나무 외 4종 2,745주, 잔디 408.24㎡ 등 식재 - 보차도경계석(L형, R형) 263.5m 설치 - 교통안전표지판 외 3종 13개소 시설물 설치 ❍ 총사업비 : 199백만원 (국·시비) 을 개선 정비공 줍사업기간 : 2016년

사업의 필요성 및 효과

❍  출퇴근시간 차량정체가 극심한 황령대로 구간에 공해·소음 예방을 위해 중앙분리 화단을 조성하여 녹지공간을 확충하고 가로환경 개선

사업진행 현황

❍ 2016. 3월 : 실시설계  용역 착공

❍ 2016. 3월 : 기술심의 요청(부산광역시)

❍ 2016. 4월 : 실시설계  용역 준공

❍ 2016. 5월 : 공사시행

❍ 2016. 6월 : 식재예정 수목 현지검수 실시

❍ 2016. 6월 : 공사완료

향후 추진계획

□ 식재된 수목의 원활한 활착을 위해 정기적 급수 실시하고  사후 관리에 만전을 기함

관련사진
[공사 전]
[공사 후]

2016년 평화공원 국화전시회

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 부산 남구 대연동 평화공원 중앙광장 일원 ❍ 규 모 : A=2,773㎡ ❍ 관람인원 : 210,000명(평일 80,000명, 주말 130,000명) ❍ 전시내용 : 국화조형물, 국화 및 일반초화, 야간조명, 한평정원 등 32종 153점 ❍ 총사업비 : 95백만원 (전액 구비) ❍ 사업기간 : 2016년 6월 21일 ~ 11월 20일

사업의 필요성 및 효과

❍ 오륙도 축제와 연계한 다양한 국화 작품 연출 및 포토존 조성하고 가을분위기가 고조될 수 있는 독특한 가을 테마정원 조성으로 관람객들에게 볼거리 제공

사업진행 현황

❍ 2016. 3월 : 2016년 평화공원 국화전시회 연출사업 계획(안) 보고

❍ 2016. 4월 : 평화공원 국화전시회 연출사업 입찰공고 및 제안서 평가위원 공개모집 공고

❍ 2016. 5월 : 제안서 평가 및 협상결과 통보

❍ 2016. 6월 : 평화공원 국화전시회 연출사업 계약의뢰(협상완료)

❍ 2016. 6월 ~ 10월 : 국화계약재배(현지검수 4회 시행)

❍ 2016. 10월 21일~11월 20일 : 국화전시회 개최

향후 추진계획

❍ 2017. 1월 : 제8회 평화공원 국화전시회 연출사업 계획(안)보고

❍ 2017. 6월 ~ 11월 : 국화전시회 준비 및 개최

관련사진
[현장사진] 2016년 국화전시회 연출(주간)
[현장사진] 2016년 국화전시회 연출(야간)

유엔평화문화거리 보행환경개선사업

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 부산 남구 대연동 경성대 앞 용소로 일원 ❍ 규 모 : 10개 노선 L=2.41km ▷ 화강판석포장 45.5a, 배수로정비 1,776m, 일방통행 확대, 차 없는 거리 시행 등 ❍ 총사업비 : 2,000백만원 (국비 1,000 / 시비 1,000) ❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년

사업의 필요성 및 효과

❍ 대상지는 주변에 대학교 및 상업시설, 근린생활시설이 밀집해 있으며, 유동인구가 많은 지역임에도 불구하고 보행환경이 열악하여 보행자 중심의 도로시설물 개선이 필요.

❍ 보행자를 위한 교통환경조성 및 테마가 있는 거리조성으로 지역경제 활성화에 기여

사업진행 현황

❍ 2015. 12. : 국민안전처 보행환경개선 지구사업 선정

❍ 2016. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2016. 10. : 區 보행환경개선자문위원회 자문

❍ 2016. 11. : 국민안전처 자문위원회 자문

❍ 2016. 12. : 용역 중간보고회

❍ 2017. 02. : 주민설명회 개최

❍ 2017. 03. : 용역 최종보고회

❍ 2017. 05. : 市 계약심사

❍ 2017. 05. : 설계용역 준공

❍ 2017. 07. : 공사 착공

향후 추진계획

❍ 2017. 12. : 공사 준공

관련사진
[조감도(1)]
[조감도(2)]

용호3동 이면도로 교통체계개선

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 용호3동 일원 ❍ 규 모 : 이면도로 교통체계 개선(일방통행, 보도설치 등) ▷ 교통표지판 설치 및 정비 68개소, 보도블록포장 101㎡, 차선도색 166㎡ 등 ❍ 공 사 비 : 146,890천원 (도급 56,080, 관급 87,990, 폐기물 2,820) ❍ 공사기간 : 2015. 2. 3. ~ 2016. 11. 30.

사업의 필요성 및 효과

❍ 차량정체가 심한 용호3동 이면도로에 일방통행, 보도조성 등을 통하여 교통소통원활 및 주민불편 해소

사업진행 현황

❍ 2013. 02 ~ 12 : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2014. 04. : 주민설문조사

❍ 2014. 11. : 현장 주민설명회

❍ 2014. 11. : 제3차 교통안전시설 심의위원회(남부경찰서) 심의의결

❍ 2015. 02. : 공사 착공

❍ 2016. 11. : 일방통행 시행(2016.11.28.)

□ 2016. 11. : 공사 준공

향후 추진계획

❍ 일방통행에 대한 지속적인 모니터링으로 주민불편사항 해소

관련사진
[위치도 및 현장사진]

문현1동 6통주변 도로개설

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 문현1동 6통주변(성암사~현대택배 간) ❍ 사 업 비 : 1,400백만원(기투자 1,400) ▻ 재원별 : 시비 500, 교부세 900/공사 325, 보상 1,065, 기타 10 ❍ 사 업 량 : 도로개설 L=220m, B=8m ▻ 기시행 : L=100m, 금회 L=120m ❍ 사업기간 : 2010 ~ 2017년

사업의 필요성 및 효과

❍ 도로미개설로 단절되었던 진남로 188번길과 198번길 연결로 주변 교통소통 원할 및 도시균형발전 촉진

❍ 고지대 주거환경 열악지역 생활환경 개선

사업진행 현황

❍ 1994.  3  도시계획시설(소로2-85호선) 결정

❍ 2011. 12  도로개설 L=30m 개설 (시비 500백만원)

❍ 2012. 12  도로개설 L=70m 개설 (특별교부세 500백만원)

❍ 2015. 11  특별교부세 400백만원 교부

❍ 2016. 12  공사 착공 (도로개설 L=120m)

❍ 2017.  5  전체사업 준공 (총연장 L=220m)

향후 추진계획

❍ 해당사항 없음

관련사진
[현장사진1]
[현장사진2]

부산항 연계수송 도로개설(감만지구)

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 우암로 112 일원 ❍ 사 업 비 : 12,500백만원(기투자 3,800, 금회 1,300, 금후 7,400) ▻ 재원별 : 시비 3,400, 교부세 1,000, 기타 8,100/ 공사 4,710, 보상 7,640. 기타 150 ❍ 사 업 량 : 도로개설 L=1,325m, B=10m ▻ 기시행 : L=948m, 금회: L=120m, 금후: L=257m ❍ 사업기간 : 1992 ~ 2018년 이후

사업의 필요성 및 효과

❍ 소방도로개설로 주민 및 차량통행 불편 해소

❍ 장기미집행 도시계획도로 개설로 지역주민 숙원해소

사업진행 현황

❍ 2011년까지 도로개설 L=948m 완료

❍ 2014~2015년 도로개설 L=120m 구간 보상완료

❍ 2016년 도로개설 L=120m 구간 공사착공(13억원)

❍ 2017년 4월 도로개설공사(L=120m) 준공

향후 추진계획

❍ 해당사항 없음

관련사진
[현장사진1]
[현장사진2]

남구 스마트도서관 구축

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 남구청 2층 정문 무인민원발급기 옆 ❍ 사업내용 : 365일 실시간 도서 대출 ․ 반납이 가능한 스마트도서관 기기 설치 ❍ 사 업 비 : 140백만원 (구비) ❍ 사업기간 : 2016. 6월 ~ 2016.8월

사업의 필요성 및 효과

❍ 구청 방문 민원인과 지역주민들의 도서관 접근성 향상을 위한 도서대출         서비스를 제공코자 신개념 도서 서비스 도입 필요

❍ 부산 최초 365일 24시간 이용 가능한 생활밀착형 스마트도서관 시스템 구축       으로 실시간 도서 대출 ․ 반납서비스 제공 (5단 서가 500권 탑재)

❍ 모바일 홈페이지 및 온라인 도서회원가입 서비스 구축과 연계하여 현장에서       회원가입 및 도서 대출이 가능한 원스탑서비스 제공

❍ 지역사회 지식문화서비스 공유를 위한 찾아가는 미래형 도서관 모델 제시

사업진행 현황

❍ 2016. 6월 : 구축계획 수립

❍ 2016. 7월 : 보안성 검토, 스마트도서관 기기 설치 및 시스템 구축

❍ 2016. 8월 : 스마트도서관 시연회 및 개관(8.17.)

관련사진
[남구 스마트도서관 개관식]
[시연회]

백운포체육공원 테니스장 이전 조성

	【 사 업 개 요 】
❍ 위 치 : 부산시 남구 백운포로 108 ❍ 규 모 : 부지면적 5,732㎡ ❍ 주요시설 : 테니스코트 8면, 관리동 2동, 백코트 1면, 조명탑 7기 ❍ 총사업비 : 338,952천원 (전액구비) ❍ 사업기간 : 2016년 2월 ~12월

사업의 필요성 및 효과

❍ 기존 테니스장 부지내 실내빙상장 건립에 따라서 백운포체육공원 동편 소운동장에

대체구장 클레이 테니스코트 8면 조성

❍ 노후 시설(배수관로, 조명시설, 관리동)을 교체 설치함으로써 쾌적한 운동환경을 조성하여 테니스코드 이용회원 만족도 제고 및 생활체육 활성화에 기여

사업진행 현황

❍ 2016. 2.  5. : 테니스장 이전 조성계획 수립

❍ 2016. 6. 13. ~ 7. 12. : 실시설계 용역착수 및 완료

❍ 2016. 8. 10. ~ 8. 19. : 토목, 전기, 조경공사 발주 및 계약

❍ 2016. 8. 24. : 토목, 전기, 조경공사 착공

❍ 2016. 9. 12. : 공사 추진상황 보고(토목 및 전기공사 변경사항 등)

❍ 2016. 9~10월

▷ 토목공사 : 철거(아스콘 등)공사, 상수관(152m)우수관(1,159m) 설치, 자갈포설

▷ 전기공사 : 전선관(561m)매설, 조명탑 전주(7본)설치

▷ 조경공사 : 교목(39주), 관목(1,600주) 이식

❍ 2016. 11~12월

▷ 토목공사 : 마사토(5,124㎡) 포설·다짐, 관리동(2개동), 휀스(165경간)설치

▷ 전기공사 : 조명등기구(120개), 배전반(2면) 설치, 조도측정·조정

▷ 조경공사 : 조경석(8.29ton) 설치

❍ 2016. 12. 19. : 토목, 전기, 조경공사 준공(‘16.12.22.준공검사 실시)

향후 추진계획

❍ 테니스장 활용도 개선을 위한 주민참여 프로그램 확대 운영으로 생활체육 활성화 도모

관련사진
[주간사진]
[야간사진]